문서번호	보행정책과-3671
결재일자	2016.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	보행시설팀장	보행정책과장	보행친화기획관
전하현	박찬규	이방일	09/27 서성만

준공기한 연기 검토보고

(대표보행거리, 퇴계로 도로공간재편 기본 및 실시설계용역)

2016. 9. 27.

도시교통본부

(보행정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

준공기한 연기 검토보고

(대표보행거리, 퇴계로 도로공간재편 기본 및 실시설계용역)

□ 관련근거

○ 지방자치단체 용역계약 일반조건(행정안전부 예규 제324호, 2010.7.26.)

- 제7절 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지, 제2조 계약기간의 연장

○ 과업내용서

- 준공기한 연기 : 제1장 일반사항 15조(과업내용 변경)관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 부도심권(대표보행거리)선정 기본설계,

도심권(퇴계로) 도로공간재편 기본 및 실시설계 용역

○ 계 약 자 : ㈜서우티이씨 대표 강대신

○ 계약금액 : 금일억육천사백구십구만오천원정(￦164,995,000)

○ 계약일자 : 2015년 10월 23일

○ 착수일자 : 2015년 10월 23일

○ 준공기한 : 2016년   9월 30일

□ 과업내용

○ 부도심권(대표보행거리)선정 기본설계

- 지역중심 대표보행거리 11개소 교통현황 조사 및 3개소 선정 기본설계

○ 도심권(퇴계로)도로공간재편 기본 및 실시설계

- 퇴계로 교통상황 모니터링 및 차로축소, 공간활용방안 설계용역

□ 추진현황

○ ’15.10.23     : 용역착수

○ ’15.12~’16.1 : 서울역고가 통제에 따른 교통상황 모니터링

○ ’16.1 ~’16.4  : 전문가 및 관계부서 자문회의 개최(3회)

○ ’16.5 ~’16.6  : 차로조정방안 확정

○ ’16.6 ~’16.9  : 교통안전시설심의, 디자인, 가로수 심의 등

○ ’16.1 ~’16.9  : 주민간담회, 주민설명회 개최

□ 준공기한 연기내용

○ 준공기한

- 당    초 : 2016.9.30.

- 변    경 : 2016.10.31.

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유

- 도시공원(소)위원회 심의 결과에 따른 설계내용 반영과 공사중 교통소통처리대책 심의 등 후속일정 상황등을 고려한 최적의 설계를 위한 설계기간 연기 필요

□ 향후계획

○ 준공기한 연기의뢰

- 재무과 변경계약 요청

○ 계약상대자(㈜서우티이씨)에게 통보하여 용역수행에 차질이 없도록 조치

끝.