시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2013 행정포털 개선사업 주간보고 (17주)

1. 2013 행정포털 개선사업의 17주차 추진실적을 보고 드리고자 합니다.

○ 추진기간 : 2014. 3. 31. ~ 4. 4  (17 / 26주차)

○ 추 진 율 : 59% (계획 60%)

- 지연사유 : 감리지적 사항(검사기준서, 요구사항추적표) 작성 지연

○ 추진실적

- 사업관리 : 58% (계획 62%)

· 감리 시정조치계획 수립 및 결과 보완 (산출물 보완)

- UX/UI 컨설팅, 인프라 구성 : 100%

- 시스템개발 : 55% (계획 55%)

· 스토리보드 및 프로그램 명세서 수정, 요구사항 추적표 작성

· 게시판 퍼블리싱 완료

· 메인 및 게시판, 개인화 부문 UX전환 진행

· 게시판 검색, 설명조회 기능 완료, 관리자/사용자 모드 기능 진행

· 파일다운/업로드 기능 설치 완료, 브라우저 호완성 오류 처리 진행

붙임:  주간업무보고서(17주차) 1부.  끝.

주무관	김대원		프로젝트관리팀장	김기항		정보시스템담당관	04/03 임성우
협조자
시행	정보시스템담당관-4370	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 3층 정보시스템담당관	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2986	/전송	02-2133-1071	/	doomsday@seoul.go.kr	/	대시민공개