	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(아스콘) 납품기한 연기 요청(도림교 확장)

우리부에서 시행 중인 『도림교 확장공사』에 소요되는 관급자재의 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 도림교 확장공사

나. 물 품 명 : 아스콘

다. 변경사유 : 시설공사 준공기한 연기에 따른 관급자재 납품기한 연기

라. 관급자재 변경 내역

품 명	납품요구 번 호	계약업체명	규 격	수 량	납 품 기 한		비고
					당 초	변 경
아스콘	12-14-1 -04759-00	서울경인아스콘 공업협동조합	BC-1 외 2종	820톤	2014/ 3/ 6	2014/ 4/30

끝.

	토목부장
주무관	정문수		광역도로과장	代조양연		토목부장	04/03 노우성
협조자
시행	토목부-6407	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15 2동3층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2561	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개