투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	전기공사(총차) 공사기간 연기 계약의뢰 (강남순환4공구 건설 전기공사)

우리 본부에서 시행하는 『강남순환도시고속도로(4공구) 전기공사』와 관련, 원활한 사업 진행을 위해 아래와 같이 공사기간 연기 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 전기공사

나. 전기공사(총차) 공사기간 연기 계약의뢰 현황

구 분		금액(원)	공사기간		비고
			당 초	변 경
도급비	총차	1,790,860,780	’10.05.25.~’14.05.03	’10.05.25.~’16.05.19	증747
	1차	50,000,000	’10.05.25.~’10.12.20	변경없음	준공

다. 계약금액(총차) : 변경없음

라. 계약업체 : ㈜세흥건설외 1개사  대표 홍철희

마. 계약방법 : 장기계속공사

바. 연기사유 : 선행공정인 토목공사 지연에 따라 후속공정인 전기공사 시기 미도래

사. 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

아. 지체상금부과여부 :  미부과

따로붙임  1. 공사기기간 연기 보고서

2. 계약서 사본 및 합의서 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	권오식		설비부장	04/03 박기형
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-3582	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개