시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2013년 행정포털 개선 사업 주간보고

1. 2013 행정포털 개선사업의 추진실적(6주~16주)을 보고 드리고자 합니다.

○ 추진기간 : 2014. 1.13. ~ 3.28.  (총26차 중 6 ~ 16주)

○ 추 진 율 : 56% (계획 59%)

- 지연사유

· 사업관리 부문 : 중간 감리 결과에 따른 설계 단계 산출물 보완 필요

· 시스템개발 부문 : 요구사항 확정 지연으로 디자인 및 퍼블리싱 지연

○ 추진실적

- 사업관리	: 52% (계획 56%)

· 설계단계(중간) 감리 실시 : ‘14. 3.24. ~ 3.28.

· 감리 지적 사항 : 테일러링, 요구사항 추적표, 검사기준서 등

- UX/UI 컨설팅: 100%	(‘13.12.23. ~ ’14. 2.23.)

- 인프라 구성	: 100%	(‘13.12.23. ~ ’14. 2.10.)

- 시스템 개발	: 44% (계획 46%)

· 기존 시스템 분석, 필요 기술요소 확정, 개발/운영 서버 구성 완료

· 요구사항 정의 및 명세 확정

· 기술요소 검증, 컴포넌트 및 I/F, 아키텍쳐, DB 설계 완료

· 프론트 디자인 시안 완료, 세부 시안 및 퍼블리싱 진행 중

· 메인 및 서브, 게시판, 검색엔진 이중화, 통합관리 구현 진행 중

붙임:  1. 주간업무보고서 (1월, 6~8주차) 1부.

2. 주간업무보고서 (2월, 9~12주차) 1부.

3. 주간업무보고서 (3월, 13~16주차) 1부.  끝.

주무관	김대원		프로젝트관리팀장	김기항		정보시스템담당관	04/03 임성우
협조자
시행	정보시스템담당관-4371	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 3층 정보시스템담당관	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2986	/전송	02-2133-1071	/	doomsday@seoul.go.kr	/	대시민공개