문서번호	설비부-3586
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김은덕		권오식	04/03 박기형
협조

『구리암사대교 건설 전기공사』

가로등 LED 반영사항 실정보고내용 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04

도시기반시설본부

(설비부)

『구리암사대교 건설 전기공사』

가로등 LED 반영사항 실정보고내용 검토

우리 본부에서 시행 중인 『구리암사대교 건설 전기공사』와 관련하여 책임감리단으로부터 가로등 LED 반영에 따라 배관 배선 변경을 위한 실정보고가 있어 검토한 결과임

공사개요

공 사 명 : 구리암사대교 건설 전기공사

도 급 액 : 금5,351,980,000원

공사기간 : 2010. 7. 28 ~ 2014. 12. 31

도 급 자 : 모범전설(주)

감 리 단 : 도화엔지니어링 외 1

관련근거

암사(감리)2014-168(2014.3.25.) ‘구리암사대교 가로등 변경(MH→LED) 실정보고

추진경위

2013. 10. 22. : 가로등 LED 조명 적용 구간 보고

2014. 01. 16. : 가로등 LED 반영 구간 케이블 및 배관 규격 검토 업무지시

2014. 02. 11. : 가로등 LED 반영 구간 케이블 및 배관 규격 검토 보고

검토내용

변경사유

- 강변북로, 암사대교 교량, 고역연결로 가로등에 LED 조명을 반영함으로써 적정 규격의 배관·배선 반영

주요 변경내용

금액:천원

구 분	당 초	변경	금액 증감
구리방면	전선관(30mm) : 4,825m 전선관(40mm) : 3,223m 전선관(50mm) : 1,650m 전선관(65mm) : 278m 케이블(6㎟×1C) :20,217m 케이블(10㎟×1C):6,817m 케이블(25㎟×1C):7,348m 케이블(50㎟×1C):1,483m	전선관(30mm) : 5,319m 전선관(40mm) : 3,655m 전선관(50mm) : 981m 전선관(65mm) : 21m 케이블(6㎟×1C) :22,920m 케이블(10㎟×1C):8,547m 케이블(25㎟×1C):4,085m 케이블(50㎟×1C):49m	-12,704
암사방면	전선관(30mm) : 5,156m 전선관(40mm) : 4,615m 전선관(50mm) : 1,759m 전선관(65mm) : 402m 케이블(6㎟×1C) :21,974m 케이블(16㎟×1C):14,284m 케이블(50㎟×1C):3,061m	전선관(30mm) : 5,321m 전선관(40mm) : 4,173m 전선관(50mm) : 1,852m 전선관(65mm) : 309m 케이블(6㎟×1C) :25,083m 케이블(25㎟×1C):9,610m 케이블(50㎟×1C):1,409m	-10,415
합 계			-23,119

※ 금액 증감은 직접공사비 기준임

감리단 의견

- 변경 구간에 대하여 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 제12조에 의거 LED로 변경함이 타당하다고 봄

조치의견

책임감리단 검토 보고 내용이 적합한 것으로 판단되어 실정보고 사항을 승인하고, 향후 설계변경시 반영하여 계약금액을 조정할 수 있도록 감리단에 통보하고자 함.

붙 임 : 책임감리단 검토 보고내용 1부.  끝.