투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 기간연장 승인 통보(마곡 롯데중앙연구소 주변도로)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 롯건중연 제 2017-51(2017.04.28.)호와 관련입니다.

3.  위 호와 관련하여 『교통신호기 원인자부담공사 공사기간 연장요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 마곡 롯데중앙연구소 신축공사중 교통신호기 설치공사

나. 공사장소 : 강서구 마곡동 295-3 주변

다. 원 인 자 : 롯데건설

라. 감 리 사 : ㈜트래픽스

마. 시 공 사 : ㈜우진신호

바. 변경내용 및 요청 : 토목공사 지연에 따른 공사기간 부족으로 준공기                                        한 지연

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	승인통지일 ~ 2017.04.30.	승인통지일 ~ 2017.05.30.	30일 증

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	(주)롯데건설,(주)우진신호,(주)트래픽스
주무관	고두규		주무관	정경성		기전과장	05/04 代장종창
협조자
시행	기전과-6006	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개