투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(어르신복지과장)
(경유)
제목	시립중랑노인전문요양원 증축 설계용역의 검토의견 통보

1. 어르신복지과-(2017. 5. 2)호와 관련입니다.

2. 시립 중랑노인전문요양원 증축공사 설계의 전기실 설치에 대한 사항은 제3안(병원 기존 전기실내 변압기 교체)으로 용역업무추진하도록 설계자에게 통보하였음을 알려드립니다.

3. 아울러, 기본설계완료시에 공사비 예정가격이 예산확보 허용범위내 전기실 별도설치가 가능한 경우에 지하실에 별도로 설치할 수 있도록 설계반영은 설계용역기간의 연장이 불가피한 사항으로 현재도 의사결정이 지연되어 설계일정에 차질이 발생된 상태입니다.

4. 또 다시 설계용역의 지연으로 연내 공사계약(원인행위)이 이루어지지 않을 경우에는  정상적인 사업추진이 어려워 기본설계 확정 이후에는 전기실 관련 추가 설계변경의 반영이 불가함을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	05/04 김진용
협조자
시행	건축부-7740	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)