문서번호	설비부-3561
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
정광식	代정광식	04/03 박기형

『IT Complex 건립공사(자동제어공사 외 4개 공종)』

하도급 계약변경 검토 보고

2014. 4.

도시기반시설본부

(설 비 부)

하도급 계약변경 검토 보고

IT Complex 건립공사 e-sports 경기장, 지하주차장 증설 등 설계변경에 따른 하도급 변경 계약이 체결되어 이에 대한 검토 및 조치의견 보고임.

관련 공문

□ 감리단 실정보고

- 상암ITC감 제14-36호(2014.04.01.) 하도급 변경계약 검토보고

: 일반설비공사(2공구), 진공청소설비공사, 자동제어공사, 엘리베이터공사

소방설비공사(2공구)

□ 변경사유 : e-sports 경기장 및 지하주차장 증설 설계변경에 따른 하도급 변경 계약

감리 실정보고 내용

□ 하도급 물가변동에 따른 계약금액 변경

업 체	구 분	하도급할 금 액	하도급금액	증감금액	하도급 비율	비 고
㈜동산테크 -일반설비(2공구)-	당 초	3,927,671,122원	3,407,442,824원		86.8%
	변 경	3,862,961,273원	3,717,133,149원	309,690,325원	96.2%
㈜동산테크 -소방설비(2공구)-	당 초	1,053,484,699원	950,044,376원		90.2%
	변 경	1,104,192,628원	1,181,958,851원	231,914,475원	107.0%
㈜스카이시스템 -진공청소설비-	당 초	56,849,161원	65,032,000원		114.4%
	변 경	61,107,537원	69,718,000원	4,686,000원	114.1%
대림아이엔에스(주) -자동제어-	당 초	2,740,127,900원	2,661,074,900원		97.1%
	변 경	2,980,145,480원	2,883,755,600원	222,680,700원	96.8%
오티스엘리베이터(유) -엘리베이터-	당 초	2,157,301,236원	2,037,855,600원		94.5%
	변 경	2,523,071,444원	2,696,442,353원	658,586,753원	106.9%

□ 공사기간 변경

공 종	업체	당 초	변경후	비 고
일반설비(2공구)	㈜ 동산테크	′10.05.20.~′14.10.06	′10.05.20.~′15.10.06	원도급자 대림산업(주) 공사기간 변경
소방설비(2공구)	㈜동산테크	′10.05.20.~′14.10.06	′10.05.20.~′15.10.06
진공청소설비	㈜스카이시스템	′11.02.18.~′14.10.06	′11.02.18.~′15.10.06
자동제어	대림아이엔에스(주)	′11.03.31.~′14.10.06	′11.03.31.~′15.10.06
엘리베이터	오티스엘리베이터(유)	′11.04.21.~′14.10.06	′11.04.21.~′15.10.06

□ 하도급 계약변경 통지

변경 계약일	통지일(시공사→감리단)	보고일(감리단→발주청)
2014. 02. 28.	2014. 03. 28.	2014. 04. 01

검토 및 조치의견

□ 검토의견

- 원도급자인 대림산업(주)의 e-sports경기장, 지하주차장 증설 등 설계변경에 따른 하도급 업체와의 계약 변경사항으로 하도급자 시공능력, 변경계약 관련 제반서류 검토 결과 적정 함.

□ 조치사항

- 하도급 계약 변경 건에 대해 건설총괄부(건축부 참조)에 통보 조치

따로붙임   하도급 변경계약 기술검토서 각 1부(별도 첨부). 끝.