투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	「2014년 보라매공원 시설물 재정비공사 실시설계용역」 준공기한 연기 의뢰

1. 시설과-1068(2014.4.3)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진 중인 『2014년 보라매공원 시설물 재정비공사 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2014년 보라매공원 시설물 재정비공사 실시설계용역

나. 도 급 액 : 금12,640,000원

다. 용역기간 : 2014. 03. 07 ~ 2014. 04. 05

라. 도 급 자 : ㈜그룹한 어소시에이트  대표 박명권

마. 준공기한 연기

1) 당 초 : 2014. 03. 07 ~ 2014. 04. 05

2) 변 경 : 2014. 03. 07 ~ 2014. 04. 19

바. 지체상금 부과검토

1) 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

2) 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 예산과목 : 공원조성과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비및부대비, 시설비

붙  임 : 준공기한 연기 검토보고서 1부.  끝.

2. 관련서류 각 1부.  끝.

	시설과장
주무관	김재희		시설팀장	홍순철		시설과장	04/03 변규열
협조자	주무관	최지효
시행	시설과-1072	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33(신대방동)	/
전화	02)2181-1160	/전송	02)2181-1169	/		/	대시민공개