문서번호	설비부-3579
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		권오식	04/03 박기형
협조
	경리과장		최영미

『강남순환도시고속도로(4공구) 전기공사』

공사 기간 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『강남순환도시고속도로(4공구) 전기공사』

공사 기간 연기 검토 보고

『강남순환도시고속도로(4공구) 전기공사』 선행공정인 토목공사의 공정지연으로 후속공정인 전기공사(총차)의 공사시기가 미도래하여 아래와 같이 연기하고자 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 전기공사

○ 규    모

- 도시고속도로 4~8차로, 연장 2,481m(토목)

- 가로등 225본, 분전반 6면, 지하차도등 155등, 경관조명 1식

○ 공사기간 : 2010.05.25 ~ 2014.05.03.

○ 시 공 사 : ㈜세흥건설, (유)공간전기

○ 감 리 사 : ㈜서영엔지니어링

관련근거

○ 서영강남 14-92호(2014.04.02) 『강남순환도시고속도로(4공구) 전기공사(총차)』공사기간 연기 실정보고.

보고내용

○ 공사기간 연기사유

- 선행공정(토목)의 서부간선민자도로 접속계획 방침지연, 광명시 시흥대교구간 지장건물 철거부진, 시흥UP-Ramp 주변(지역연결도로) 보상 및 이주대책 지연 등으로 공사가 지연됨에 따라 후속공정인 가로등 공사 작업 불가.

○ 공사 금액 및 공사기한 연기 내용

구 분	계약금액(원)	당초 공사기간	변경 공사기간	비고
총 차	1,790,860,780	2010.5.25.~2014.05.03	2010.5.25.~2016.05.19.	증747일
1 차	50,000,000	2010.5.25.~2010.12.20	변경없음	준공

○ 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 공사금액 : 변경없음

조치의견

○ 상기와 같은 사유로 선행공정(토목)의 공사기간이 2016.05.19.일로 연기되었기 후속공정인 전기공사(총차)의 공사기간을 2016.05.19일까지 연기하여 공사관리에 만전을 기하고자 하며, 서울특별시 재무과 및 건설총괄부에 공사기간 연기 계약의뢰하고자 함.

따로붙임 : 책임감리원 공사기간 연기 실정보고 1부. 끝.