문서번호	교통운영과-8860
결재일자	2017.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호시설팀장	교통운영과장
이귀섭		구봉서	05/10 강진동
협조

	세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기공사 감리용역 준공기한 연기 검토보고

2017. 5.

교통운영과

(신호시설팀)

세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기공사 감리용역

준공기한 연기 검토보고

세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기공사 감리용역을 도급공사 준공일까지 연기하고자 아래와 같이 보고드림

[관련근거 : SH공사 전기공사부 –1630호 (2017.5.8.)]

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기 감리용역

❍ 용역금액 : 금95,212,000원

❍ 용역기간 : 2013.9.24.~2017.04.30.

❍ 계 약 자 : 대영유비텍(주) (대표 조근환)

□ 보고내용

❍ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비고
계약기간	2013.09.24.~2017.04.30.	2013.09.24.~2017.07.31.

❍ 준공기한 연기 사유

- 교통신호기 감리용역 계약기간 연기 요청[SH공사 전기공사부–1630호]

- 세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기공사 감리용역을 도급공사  준공기한 으로 연기하고자 함

□ 향후 추진일정

❍ 재무과로 준공기한 연기 의뢰

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

3. 교통신호기 감리용역 계약기간 연기요청 공문사본 1부.

[SH공사 전기공사부–1630호(2017.5.8.)] 끝.