상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 기본설계)

우리과에서 시행중인 「서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 기본설계용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역명 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 기본설계

2. 계약자 : ㈜유신, ㈜진우엔지니어링코리아

3. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경
총 차	2017.05.14.	2017.12.31.
2 차	2017.05.14.	2017.12.31.

4. 귀책사유 : 서울특별시

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.
2. 준공기한 연기방침서 1부.
3. 합의각서 1부. 끝.

	도로계획과장
주무관	김정식		민자사업팀장	정회원		도로계획과장	05/11 하종현
협조자
시행	도로계획과-6846	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-8073	/전송	02-2133-0763	/	kjungsik@seoul.go.kr	/	대시민공개