＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약체결 보고[2016년 2차 청담동외 6개동 상수도공사]

1. 급수운영과-8207(‘17. 5.08.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소가 발주한 「2016년 2차 청담동외 6개동 상수도공사」건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하고 보고합니다.

가. 계약업체 :*************

나. 계약기간 : 2017. 1. 24 ~ 2017. 6. 30

다. 변경계약일 : 2017. 5. 11(목)

라. 변경사유 : 계약물량 증․감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경

마. 계약금액 변경

구 분		당초	변경	증·감 내역
도급비	합 계	***********	***********	증·감없음
	공급가액	***********	***********	〃
	부가가치세	**********	**********	〃

바. 추가계약보증금 : 해당없음

붙임  1. 변경계약체결내역서

2. 설계변경합의서 및 내역서 1부.  끝.

주무관	정유정		행정관리팀장	김종진		행정지원과장	김인웅		강남수도사업소장	05/11 차장운
협조자
시행	행정지원과-10560	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4720	/전송	02)3146-4953	/		/	부분공개(6)