문서번호	기술심사담당관-8747
결재일자	2017.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제118호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
오영진	류용열	김홍길		05/11 이제원
협 조
	기술관리팀장		조현석
	토목심사팀장		조임남
	건축심사팀장		도태환

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(4월)

2017. 5.

서울특별시

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(4월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 「외부전문가 기동점검단」의 `17년 4월 중 활동 결과에 대하여 보고 드림

1. 점검개요

점검일자	2017. 4. 4.(화)	2017. 4. 11.(화)	2017. 4. 22.(토)	2017. 4. 25.(화)
공 사 명	광복교~안양교 도로확장공사	강남순환도시 고속도로(8공구) 건설공사	마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설 조성공사(2단계)	신내3지구 3,4단지 도시형생활주택 건립공사
사업부서	도기본 토목부	도기본 토목부	서울주택도시공사	서울주택도시공사
공사기간 (공정률)	`16.04.01. ~ `19.09.12.(13%)	‘02.07.03.~ ’18.07.31.(41%)	‘16.03.29. ~ ’18.03.28.(27%)	‘15.10.28. ~ ’18.04.18.(46%)
점검자	· 한맥기술 박윤규 · 한국시설안전연구원 이왕철 · 도화엔지니어링 나상호 (직원 : 기술관리팀 2)	· 서영엔지니어링 윤상길 · 이원이엔지 기노채 · 지호엔지니어링 이오형 (직원 : 토목심사팀 3)	· 건화 이상환 · 바우컨설턴트 김태흥 · 수성엔지니어링 안순용 (직원 : 기술관리팀 2)	· 보성구조이앤지 김영민 · 미공간 유병학 · 한국가설협회 김곤묵 (직원 : 건축심사팀 3)

2. 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- ONE-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비와 인력투입현황 관리여부

- 현장반입 건설기계 임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 가시설 및 토공, 안전물 설치상태 등 시공상태 확인

- 지하차도 및 가시설 시공상태 점검

- 교량하부 통행인의 안전시설 등 현장 안전관리 실태 점검

❍ 구조물에 대한 품질․안전․공정관리 등 시공관리

- 콘크리트 타설, 철근 조립 시공실태 및 구조물 품질관리 실태 점검

- 작업공간 주변정리 정돈 등 안전관리 실태 점검

3. 점검결과

□ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	55	32	11	12
광복교~안양교 도로확장공사	12	8	2	2
강남순환도시 고속도로(8공구) 건설공사	10	9	-	1
마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설조성공사(2단계)	13	7	3	3
신내 3지구 3,4단지 도시형생활주택 건립공사	20	8	6	6

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

- 매헌지하차도(Sta 1+262) 단면 변화부 응력이 집중되므로, 단면 변화부에 Strut 추가 설치 필요(강남순환도시 고속도로(8공구) 건설공사)

- 염곡지하차도 중간파일(67~68번 파일 등) 간격이 설계서와 상이한 것으로 판단되므로 이에 대한 검토 필요(강남순환도시 고속도로(8공구) 건설공사)

- 광복교 앵커 설치구간은 지반이 불량한 것으로 판단되므로 가시설 거동상태 정밀관찰 필요(광복교~안양교 도로확장공사)

- 광복교 흙막이 가시설 부분 띠장 간격재 사이 채움 조치 필요(광복교 ~안양교 도로확장공사)

- 안양교 가설교량(왕복2차선)은 준공 때까지 공용되는 가설교량으로 지속적인 계측관리를 통한 하부구조(침하) 및 상부구조의 변형, 처짐 등에 대한 철저한 관리가 필요(광복교~안양교 도로확장공사)

- 안양교 및 광복교 가시설 H형강(엄지말뚝, 띠장 strut) 천공 등에 의한 단면손실 발생(광복교~안양교 도로확장공사)

- 매헌지하차도 과천구간 측(마구리 부분) 압성토 제거시 사전 보강후 시공할 것(강남순환도시 고속도로(8공구) 건설공사)

- 3, 4단지 시스템동바리 및 비계 설치상태 미흡[수평재 누락, 조절나사 탈락, 수직재 변형, 지반침하 등](신내 3지구 3,4단지 도시형생활주택 건립공사)

- 시스템동바리 시공구간 사보강재 미설치됨(마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설조성공사[2단계])

- 일부구간 절토사면의 기울기가 설계 기준치를 초과하여 사면유실이 우려됨(마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설조성공사[2단계])

품질관리 분야

- 직교클램프 및 조절형 난간대 등 가설기자재의 경우 미 인증 자재를 사용하거나, 단면손실 및 부식된 자재를 사용(신내 3지구 3,4단지 도시형 생활주택 건립공사)

- 광복교 하부 신․구 교각 접촉부 수평철근 배근 관련 콘크리트 타설시 처짐 및 간격유지에 대한 검토 필요(광복교~안양교 도로확장공사)

- 철근조립 시 겹이음이 일정 위치에 집중되고 있음(마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설조성공사[2단계])

- 4단지 Transfer Girder(전이보)는 수평으로 분리타설 되어 있어 신구콘크리트 접합구간 조면처리 등을 통한 접합성능 확보토록 조치요함(신내 3지구 3,4단지 도시형생활주택 건립공사)

- 4단지 전이층 콘크리트 타설하중을 하부 Support가 견딜 수 있는 지 여부에 대한 검토 요함(신내 3지구 3,4단지 도시형생활주택 건립공사)

- 402동 주차장 Slab 이어치기면 Conc. 타설 시 접착을 위한 메쉬 미설치(신내 3지구 3,4단지 도시형생활주택 건립공사)

- 옹벽 상부 차량방호벽 균열 유도부가 도로부에만 설치됨(신내 3지구 3,4단지 도시형생활주택 건립공사)

기타 분야

- 오탁방지망 주기적 청소 및 우기시 작업사항을 고려하여 추가 설치 검토 필요(광복교~안양교 도로확장공사)

- 주요 공종 추진시 공사관리관의 입회에 대한 확인 자료가 없음(마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설조성공사[2단계])

- 현장 투입 일부 건설기계에 대하여 대여대금 지급보증서 미교부(마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설조성공사[2단계])

4. 조치 내용

□ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 전달하여 즉시 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 시정 및 현장관리토록 공문으로 통보

붙임 : 점검 주요 지적사례 1부.  끝.