문서번호	물재생시설과-6944
결재일자	2017.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	물재생시설팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
양해선	이웅희	代이웅희		05/11 권기욱
협 조

지역형 소규모수처리시설 설치 타당성조사 및 기본계획

용역 준공기한 연기 보고

2017. 5.

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

지역형 소규모수처리시설 설치 타당성조사 및 기본계획

용역 준공기한 연기 보고

『지역형 소규모 수처리시설 설치 타당성조사 및 기본계획』용역의 내실 있는 과업수행을 위한 용역 준공기한 연기 보고임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 지역형 소규모 수처리시설 설치 타당성 조사 및 기본계획

○ 계 약 자 : ㈜이산 외 2(㈜도화엔지니어링, ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소)

○ 계약금액 : 금432,690,000원(일금사억삼천이백육십구만원정)

○ 용역기간 : 2016. 4.15. ~ 2017. 5.15.

○ 주요과업내용

-  자료수집(국내·외 사례) 및 현장 조사

-  조사자료 분석 및 지표설정

-  경제성 등 타당성 분석

-  소규모 수처리시설 계획

-  소요사업비 산정 및 재정계획 수립 등

□ 용역 추진사항

○ ’16. 4.15 : 용역 계약 · 착수

○ ’16. 5.24 : 행정2부시장 보고

○ ’16. 8.22 : 자문회의 개최(1차)

○ ’16.12.22 : 자문회의 개최(2차)

○ ’17. 4.12 : 지역형 발생원 처리 계획의 ‘서울시 생활권 계획’ 반영

- 공원 등 도시계획시설 계획시 환경기초시설을 추가설치 하여 발생원 처리 도입 검토

○ ’17. 3.16, 4.19 : 연세대, 서울대 교내 소규모 처리시설 설치 협의

- 학교 자체 재원조달 곤란(시 재정 투입 필요)

□ 준공기한 연기

○ 준공기한 연기 : 88일

구 분	당 초	변 경
기 간	’16. 4.15. ~ ’17. 5.15.	’16. 4.15. ~ ’17. 8.11.

○ 계약금액 : 변동없음(지체상금 미 부과)

○ 연기사유 : 창동상계 신경제중심지 조성 등과 연계하여 소규모 수처리시설 설치 계획 반영을 위한 협의기간 소요에 따른 용역 준공기한을 연기하고자 함

□ 향후 일정(안)

○ 변경계약(준공기한 연기) 의뢰(재무과)  : ’17. 5

○ 지역발전본부(동북권사업반) 협의        : ’17. 5

○ 전문가 자문회의 개최(3차)              : ’17. 6

○ 최종보고회 개최                        : ’17. 7

○ 용역 준공                             : ’17. 8

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.