문서번호	도시철도계획부-4894
결재일자	2017.5.12.
공개여부	비공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	도시철도설계과장		도시철도계획부장		도시철도국장		도시기반시설본부장
신상형	이명수		권영찬		이정화		05/12 고인석
협 조
	건설총괄부장					이상국
	도시철도사업부장					代김형건
	건축계획과장					송종훈

별내선(8호선연장) 1.2공구 건설공사

공사 발주 계획 보고

2017. 5.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□	언론보도자료
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사

공사 발주 계획 보고

별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사 공사 발주 계획을 보고드림

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 강동구 암사동 ~ 서울시계(한강)~ 구리시 토평동

❍ 규    모 : 연장 3.72㎞, 정거장 1개소, 차량기지내유치선 7편성

❍ 공사기간 : 착수일부터 2,190일(72개월)

❍ 공 사 비 : 279,696백만원 (1차 25,843백만원)

구 분		계	1공구	2공구
위 치		강동구 암사동 ~ 구리시 토평동	암사동 ~현대홈타운	현대홈타운~ 토평동
입찰방법		기타(1공구) 대안(2공구)	기타공사 (종합평가낙찰제)	대안입찰공사 (부분대안)
시행분야		토목, 건축	토목, 건축	토목
규 모		연장 3.72㎞ 정거장 1개소 차량기지유치선 7편성	연장 1.18㎞ 정거장 1개소 차량기지유치선 7편성	연장 2.54㎞ ․대안 1.26㎞(NATM 등) ․원안 1.28㎞(쉴드TBM)
공 사 비	총괄	279,696백만원 ․토목 274,243 ․건축 5,453	103.725백만원 ․토목 98,272 ․건축 5,453	175,971백만원 ․대안 90,864 ․원안 85,107
	1차	25,843백만원 ․토목 25,843	15,843백만원 ․토목 15,843	10,000백만원 ․토목 10,000
공사기간	총괄	2,190일(72개월)	2,190일(72개월)	2,190일(72개월)
	1차	300일	300일	300일

※ 예산과목

․광역철도건설(교통개선분담금), 광역철도건설사업(교통개선분담금), 별내선(8호선연장)광역철도건설(교통개선분담금), 시설비

․광역철도건설(광역교통시설특별회계), 광역철도건설사업(광역교통시설특별회계), 별내선(8호선연장)광역철도건설(광역교통시설특별회계), 시설비

Ⅱ		추진경위

❍ ’14.12.18 : 별내선 기본계획 고시 (국토교통부)

❍ ’15.06.17 : 별내선 사업 추진계획 방침 (시장 제160호,도시교통본부)

❍ ’15.06.18 : 별내선 추진계획 보고 (행정2부시장 제241호)

❍ ’15.09.17 : 별내선 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ ’16.06.27 : 기본설계 건설기술심의

❍ ’16.08.25 : 입찰방법 및 공구분할 검토보고 (행정2부시장 제235호)

- 2개공구로 분할, 1공구 기타공사,  2공구 대안입찰공사

❍ ’16.09.21 : 실시설계 건설기술심의

❍ ’16.10.10 : 대형공사 입찰방법 심의

❍ ’16.11.28 : 대안 입찰안내서 심의

❍ ’17.04.28 : 총사업비 조정 승인 (기획재정부)

Ⅲ		계약 및 입찰방법

❍ 계약방법 : 조달청 계약 의뢰(긴급, 장기계속공사)

․지방재정 신속집행 10대 추진 지침(행자부, ‘17.2)에 2017년 상반기 입찰은 특별한 사유가 없는 한 모두 긴급입찰로 시행토록 함

․별내선 경기도 시행구간은 16년 5월 착공하여 공사중으로 전구간 사업 일정을 감안하여 서울시 시행구간인 1,2공구의 긴급입찰 시행 필요

❍ 입찰방법

- 기타공사 (1공구, 종합평가낙찰제), 대안입찰공사(2공구, 부분대안)

- 국제입찰대상공사

- 지역의무공동도급 적용 (지자체 입찰 및 계약 집행기준 제7장 제3절 1.라항)

․1공구 : 서울 지역업체 최소 시공참여비율 49%

․2공구 : 서울․경기 지역업체 최소 시공참여비율 49%

Ⅳ		입찰참가자격 및 공동계약

❍ 입찰참가자격

- 1공구 : 건설산업기본법령에 의한 토목(또는 토건), 건축 공사업 등록자

- 2공구 :

<시공분야> 건설산업기본법령에 의한 토목(또는 토건) 공사업 등록자

<설계분야> : 대안입찰에 한함

가. 엔지니어링산업진흥법령에 의한 엔지니어링 사업자로 신고하거나 기술사법령에 의하여 기술사사무소를 개설한 자로 다음 분야를 신고(등록)한 자

- 건설부문 : 철도, 토질지질, 구조, 도로공항, 교통, 도시계획

- 설비부문 : 설비

나. 전력기술관리법령에 의한 종합설계업(또는 전문설계업 1종이상)을 등록한 자

다. 소방시설공사업법령에 의한 전문소방시설설계업을 등록한 자

❍ 공동계약 방식

- 1공구 : 공동이행방식 또는 분담이행방식

- 2공구 : 시공분야는 공동이행방식, 설계분야는 분담이행방식

❍ 공동수급체 구성원 수 : 3개업체 이하로 권장

․ 난이도가 높은 도시철도 건설공사의 특성을 감안하여 시공의 안전성과 책임한계의 명확화를 위해 공동수급체 구성원 수 3개업체 이하로 권장

․ 2공구 설계분야 참가자는 구성원 수에 포함하지 않음

Ⅴ		기타사항

❍ 건설공사손해보험 : 발주기관 가입방식으로 시행

(도급비에서 건설공사보험료 제외)

․ 우리시 공사손해보험 가입방식 개선방안(재무과-50910, 2013.11.22.)에 따라  우리본부에서 별도 경쟁입찰을 통한 1,2공구 통합 건설공사손해보험 가입

❍ 신기술(특허) 선정 6개제품 협약 체결 및 발주공사비에 반영

- 2016.8.17. 별내선 특정제품 심사결과 선정된 6개 제품 사용협약 체결 및 입찰공고에 반영 (대안입찰 제외)

Ⅵ		향후 추진 일정

❍ ‘17. 5. : 공사 입찰 공고 (1,2공구)

❍ ‘17. 6. : 입찰참가자격 사전심사 및 현장설명회

❍ ‘17. 7. : 1공구 입찰 및 계약

❍ ‘17. 8. : 2공구 대안설계 및 입찰

❍ ‘17. 9. : 2공구 대안설계적격심의

❍ ‘17.10. : 2공구 계약 체결

붙임 : 1. 공사개요서 각1부(1,2공구)

2. 긴급공고 사유서 각1부(1,2공구)

3. 설계예산서 각 1부(1,2공구)

4. 입찰공고서(안) 각 1부(1,2공구).  끝.