투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(소)위원회 자문 의뢰【장안교(구교) 성능개선공사】

우리부에서 시행 중인 『장안교(구교) 성능개선공사』에 대한 설계변경(소)위원회 자문을 아래와 같이 요청코자 합니다.

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 장안교(구교) 성능개선공사

나. 규    모 :

- 기존교량 철거 : 폭 17m, 연장 200m

- 교량신설 : 폭 17m, 연장 218m(라멘교+Pre-flex Beam교)

다. 공사기간 : 2014.12.16. ~ 2017.08.31.

라. 시 공 사 : 새천년종합건설(주) 외 1개사

마. 감 리 사 : ㈜삼안 외 2개사

2. 설계변경소위원회 자문요청 내용

자문안건	증·감	비고
교량 하부 수변공간 조성 등 시공방법 변경	증 694,000천원

붙임 : 설계변경 소위원회 자문 요청서  1부.  끝.

주무관	박웅교		토목총괄과장	代오열상		토목부장	05/14 김영수
협조자	주무관	남덕희
시행	토목부-9759	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2547	/전송	3708-2599	/	pkyo2425@seoul.go.kr	/	대시민공개