투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	시설공사 설계변경 계약 의뢰(초안산 보행교량-전체2회, 1차2회)

우리본부에서 시행중인 『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사』에 대해 아래와 같이 설계변경(전체2회, 1차2회) 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

나. 도 급 비 : 5,285,629천원(1차: 1,369,000천원)

다. 공사기간 : ‘16.04.29.∼’18.04.28.(1차 : ‘16.4.29.∼’17.5.31)

라. 도 급 자 : ㈜한양산업개발

마. 예산과목

- 하천관리과(일반회계), 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경(전체2회, 1차2회)                              (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증. △감	비 고
전체 (2회)	도 급 액	5,285,629	5,298,194	증) 12,565
	공사기간	2016.04.29. ~2018.04.28	2016.04.29. ~2018.04.28	변경없음
1차 (2회)	도 급 액	1,369,000	1,369,000	변경없음
	공사기간	2016.01.12 ~2017.05.31	2016.01.12 ~2017.05.31	변경없음

사. 설계변경 사유

- 실정보고사항 반영 및 1차 2회 물량 정산에 따름

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 변경 내역서(전체2회) 1부.

3. 변경 내역서(1차2회) 1부.

4. 준공기한 연기 의뢰서 및 합의각서  각1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	노순재		교량건설과장	박용택		토목부장	05/12 김영수
협조자	계약1팀장	조현
시행	토목부-9742	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/	fortuners@seoul.go.kr	/	부분공개(5)