문서번호	시설과-2252
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
오영근	이재복	함석주	04/04 代함석주
협 조
	공원운영과장		김준현

2014년 남산공원외 1개소 CCTV 시스템 구매설치공사 계획

중부공원녹지사업소

(시설과)

2014년 남산공원외 1개소 CCTV 시스템 구매설치공사 계획

2014년 남산 및 용산공원의 CCTV 설치 계획을 아래와 같이 수립하여 공원운영에 만전을 기하고자 함.

추진근거

○ 정보통신보안담당관-3147(2014.2.18.) 2014년 도시공원·놀이터 CCTV 설치 계획 통보

사업개요

○ 사업기간 : 2014. 5 ~2014. 9

○ 예산현황

- 사업예산 : 120,000천원(국비 36,000천원, 시비 84,000천원)

- 예산과목 : 정보통신인프라 확충 및 운영, 정보통신인프라 확충, 도시공원 놀이터 CCTV 설치 사업, 공원 내 CCTV 설치(401-01)

○ 설치규모

- CCTV 수 : 8대

- 공원 수 : 남산공원(4대) 및 용산가족공원(4대)

남산공원	용산가족공원

세부 추진계획

○ 남산 및 용산공원 CCTV 설치 계획

공원명	계	년도별 설치현황						비고
		‘02	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13
남 산	55	2	-	31	4	7	11
용 산	5	-	-	2	-	3	-

- 년도별 설치현황

- 2014 설치계획

공원명	카메라 수량	카메라 화소 수	회선구분	비상벨 설치수량	비고
			자가망
남산	4	130	4	4
용산	4	130	4	4

○ 계약 및 설치방법

- 계약방법 : 조달계약

※재무과-11557(2014.3.5.)조달청 지정 우수조달 물품에 대한 우선구매 협조요청

- 설치방법 : 서울특별시 영상정보처리기기 기술기준 권고(안) ※정보통신보안담당관-3200(2014.2.19.)

○ 집행계획

구 분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	비고
추진계획	행정예고 및 발주	계약 및 선급금 지급	설치	설치	설치	준공
집행목표액 (단위:천원)	-	60,000	-	-	-	60,000
집행 목표율	-	50%	-	-	-	100%

그 동안 추진사항

○ 설치 위치 선정  : 2014. 3.

○ 설치위치 자문(용산경찰서) 시행 : 2014. 3.

○ 조달 우수제품 비교 검토 및 설계도서 작성 : 2014. 3.

향후 일정

○ 2014. 4 : ‘14년도 도시공원·놀이터 CCTV 설치 계획 제출(정보통신보안담당관)

○ 2014. 4 : 행정예고

○ 2014. 5 : 조달계약 추진

○ 2014. 9 : 준공 및 준공보고서 제출(정보통신보안담당관).

※ 사업 완료보고서와 함께 발주 및 계약서류 사본 일체 제출

첨부 : 1. 내역서 1부

2. 행정예고 공고문 1부. 끝.