투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(양재대로 녹지연결로 조성공사)

우리부에서 추진중에 있는 「양재대로 녹지연결로 조성공사」의 총차 및 차수계약(2차)에 대하여 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 양재대로 녹지연결로 조성공사

나. 도 급 비 : 총차 4,586백만원(2차 계약금 3,371백만원)

다. 공사기간 : 총차 '16.06.20~'17.06.19(2차 계약기간 '17.01.13 ~ '17.06.19)

라. 도 급 사 : 우륭건설(주) 대표 : 최부영

마. 예산과목 : 푸른도시국자연생태과, 생태복원 및 보전과 야생동물보호, 생태복원, 단절된 녹지축연결, 시설비및부대비, 시설비

바. 준공기한 연기 (※계약금액 변경 없음)

양재대로 녹지연결로 조성공사	총차	당 초	2016. 06. 20. ～ 2017. 06. 19.
		변 경	2016. 06. 20. ～ 2017. 10. 30.
	2차	당 초	2017. 01. 13. ～ 2017. 06. 19.
		변 경	2017. 01. 13. ～ 2017. 10. 30.

사. 연기사유 : 붙임 참조

붙임 :  1. 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	김소연		환경시설과장	장수철		방재시설부장	05/15 남궁용
협조자	경리과장	최정수
시행	방재시설부-8164	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 (무교동, 프리미어플레이스 빌딩 14층)	/
전화	02)3708-8782	/전송	02)3708-8756	/	ruracom@seoul.go.kr	/	부분공개(5)