문서번호	소방행정과-6781
결재일자	2017.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
김현태	천완주	윤봉수	05/15 장현태
협 조

- 현장출동 소방공무원의 직무환경 개선 및 청사시설 기능향상을 위한 - 시설 기능개선 및 자가주유설비 설치공사 시행 계획

2017.  5.

구로소방서

(소방행정과)

구로소방서 청사시설 기능개선 및 자가주유설비 설치공사 시행 계획

▣ 기계실의 노후 설비 교체로 기능향상 관리유지비 절감 및 위생 환경 개선

▣ 노후 청사 시설물의 안정성 및 효율성을 위한 시설교체 및 정비 청사 환경 개선

▣ 자가 주유시설의 노후로 유류탱크의 누유 등 문제점 해결 법 규정 준수

Ⅰ				사업개요

사 업 명 : 구로소방서 청사 기능개선 및 자가주유설비 설치공사

사업기간 : 2017. 5. ~ 2017. 7. 20.

사업대상 : 구로소방서(A·B동)

부 서 명	위 치	건 물 개 요			준공년월일	외부마감
		층수	연면적(㎡)	대지면적
구로소방서	구로구 경인로 408	3/1층	4,579.79	3,306.00	1992. 5. 2.	대 리 석

사업내용

- 지하기계실 공무직 대기실 환경개선, 불필요시설 철거, 방수복 건조대설치

- 현장출동 소방공무원의 휴식 시간 등 편안한 휴식을 위한한 힐링 쉼터 신설

- 소방업무 보조기구인 의용소방대원의 교육 및 회의 등 업무향상에 필요한         교육장 및 사무실 설치

- 체력단련실 재 구획 및 정비

- 자가주유설비 교체(주유기 2기, 경유탱크 12,000ℓ, 휘발유 5,000ℓ)

공 사 비 : 229,744천원

- 건축공사 : 186,081천원

- 전기공사 : 43,663천원(관급 30,626천원 포함)

예산과목 : 소방행정기반강화/직무환경개선/소방관서시설물유지보수/시설비및부대비/    시설비(214-401-01)

Ⅱ				발주계획

공사기간 : 착공일로부터 50일

발주방법(건축, 기계설비, 토목 포함) : 지역제한(서울시 소재) 수의견적공고

- 서울시 소재 업체중 건설산업기본법에 따라 공사를 시행할 수 있는자

(일반건축업 및 토목건축공사업 면허 소지자)

분리발주 : 전기공사(소방공사)

- 전기공사 : 지역제한(서울시 소재) 수의견적공고

관급(지급)자재 : 서울지방조달청(MCC판넬, 배전반)

Ⅲ				향후추진계획

2017. 5. : 공사발주 및 계약(서울시 재무과 건축 계약의뢰)

- 전기공사 : 자체발주 계약이행

2017. 5. : 공사착공

2017. 7. : 공사준공

Ⅳ				행정사항

24시간 현장출동 공무원의 근무여건 감안 대기실 등 개선공사 시 업무에 지장

없도록 층별 공사 완료

가설건축물 설치시 관할 구청 가설건축물 축조 신고.  끝.