문서번호	방재시설부-1201
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한종수		서관석	04/04 박종웅
협조

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」

교통소통대책 수립 용역비 실정보고 검토

2014. 4.

도시기반시설본부

(방재시설부)

교통소통대책 수립 용역비 실정보고 검토

(용허리공원 빗물저류조 설치공사)

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」중 서초대로 내 U형측구 설치 및 도로횡단 관로 매설에 따른 교통소통대책 수립 용역비 실정보고에 대한 검토 보고임.

[ 근거:잠원2감 2014-104호(2014.3.31) ]

□ 공사개요

◦ 위    치 : 서울시 서초구 서초동 용허리공원 일대

◦ 규    모 : 빗물저류조 V=15,000㎥, L=237.8m(2.0×1.5@1)

◦ 공사기간 : '12.12.21 ~ '14. 5.30

◦ 총사업비 : 11,000백만원

□ 실정보고내용

◦ 실정보고 사유

- 진흥아파트편 노면수를 처리하는 U형측구 등 유입부 구조개선 공사 추가되어(하천관리과 2013. 12. 10 개최 자문회의 시 결정)

- U형측구(L=120m) 및 도로횡단(L=25.2m) 공사시 도로점용에 따른 교통소통대책 수립하여야 함. (서울시 교통소통대책에 관한 조례 제4조,제6조)

◦ 용역비산정 : 견적단가에 낙찰률(85.496%) 적용(제경비 미반영)

업체명	품셈(교통)	한울	신화	지평	낙찰율적용	비고
견적가격	16,610,000	16,800,000	15,000,000	11,000,000	10,340,000

◦ 추가소요 예산 : 약 10,340천원 증액

◦ 감리단 검토의견

- 용허리공원 빗물저류조설치공사의 측구 및 유입관로설치 공사는 교통소통대책 수립이 필요한 공사로 용역을 수행하여 처리함이 타당 함.

□  조치의견

◦ 감리단 실정보고 내용과 같이 교통소통대책 수립은 타당한 것으로 판단되어  승인코자 하며, 추가되는 용역비는 추후 설계변경 시 반영코자 함.

따로붙임 : 감리단 검토의견서 1부. 끝.