문서번호	기전과-3516
결재일자	2017.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		代문준호	05/16 이종엽
협조
	주무관		김수진

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연기요청 검토보고(장안교-표지)

2017. 5.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연기요청 검토보고(장안교-표지)

교통안전시설물 원인자 부담공사(장안교-표지)의 준공기한 연기요청이 접수되어 검토하여 보고드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ 도시기반시설본부 토목부-9647호(2017.05.12.)
→ 교통안전시설물 원인자부담공사 준공기간 변경 요청

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 교통안전시설물(표지) 원인자부담공사(장안교)

○ 공사위치 : 동대문구 장안동92 ∼ 중랑구 면목동170

○ 공사기간 : 승인일로부터 ∼ 2016. 12. 15.

○ 원 인 자 : 도시기반시설본부 토목부

○ 시 공 사 : 초승안전

Ⅲ

준공연기 사유

○ 보고내용

장 소	당 초	변 경	변경사유
장안교 성능개선공사 현장	- 승인일로부터 ∼2016.12.15.	- 승인일로부터 ∼2017.08.31.	하천점용허가 및 수방기간 공사중지로 인한 준공기한 연기

○ 보고자 : 도시기반시설본부 토목부 박웅교 주무관

Ⅳ

검 토 결 과

○ 원인자 실정보고를 검토한 결과 공사기간 변경으로 인한 준공기한 변경을 승인하고자 합니다.

첨  부 : 원인자부담공사 준공기한 변경요청 1부.  끝.