문서번호	시설관리과-9013
결재일자	2014.4.4.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이생기	代채재일	전결 04/04 나태산

용역 준공기한 연기보고

(서울경찰청~독립문역 송배수관공사 외 1건 교통소통대책 수립용역)

2014. 4.

중부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

용역 준공기한 연기보고

(서울경찰청~독립문역 송배수관공사 외 1건 교통소통대책 수립용역)

『서울경찰청~독립문역 송배수관공사 외 1건 교통소통대책 수립용역』 시행 중 준공기한 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

현 황

용 역 명 : 서울경찰청~독립문역 송배수관공사 외 1건 교통소통대책

수립용역

용역개요 : 송배수관 및 배급수관 정비공사 시행으로 도로점용(사직로

,창경궁로 2개구간 1,850m)에 따른 교통소통대책 수립

과업기간 : 2014.02.12~2014.04.10

###################

#######################

연기 사유

서울특별시 교통소통대책 자문회의가 4월 9일에 예정되어 있으며, 교통   소통대책 자문회의 심의결과에 따른 서울지방경찰청 규제심의를 진행하   는데 있어 본 용역의 절대공기 부족

조치의견

위와 같은 실정으로 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

- 과업기간 ┍ 당초 : 2014.02.12~2014.04.10

┕ 변경 : 2014.02.12~2014.05.10

- 귀책사유 : 발주처(중부수도사업소)

- 지체상금 부과여부 : 미부과

첨 부 : 관련문서(준공기한 연기원) 1부.  끝.