문서번호	시설보수과-1746
결재일자	2017.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
김현곤	김재봉	김일운		05/17 정흥순
협 조	관리과장		윤석경
	주무관		정충모

2017년 관사아파트 리모델링 추진 변경 계획

2017. 5.

난지물재생센터

(시설보수과)

2017년 관사아파트 리모델링 추진 변경 계획

□ 우리 센터에서 추진중인 2017년 관사아파트 리모델링 공사와 관련 리모델링 후 이사비용 등으로 이주를 원하는 세대가 금년도에 없어 당초 계획을 변경 리모델링 세대수를 축소하여 효율적으로 사업을 추진코자 함.

□ 관련근거

◯ 2017년 관사아파트 리모델링 시행계획【시설보수과-691(2017.2.28)호】

□ 추진현황

• 2017. 2. 28 : 관사아파트 리모델링공사 시행계획 수립(7세대)

• 2017. 3. 02 : 관사아파트 리모델링 공사 발주

• 2017. 3. 29 : 공사계약(홍익기술 주식회사, 도급비 : 241,985천원)

• 2017. 4. 15~5. 10 : 이주세대 조사

※ 이사비용 등으로 이주를 원하는 세대 없음

□ 변경계획

<당 초>

◯ 금년도 리모델링 세대 : 7세대

• 총 7세대 [2동(5세대), 4동(2세대)]

<변 경>

◯ 현 공가 세대중 선호도가 좋은 중앙라인 3세대 실시

• 총 3세대[2동(303호, 306호, 504호)]

□ 변경사유

• 리모델링을 예산비용(3억원)내에서 공가인 7세대를 추진하고자 하였으나, 이사비용 등으로 이주를 원하는 세대가 금년도에 없어 리모델링 실효성이 적어 사업을 축소하여 최소한으로 실시 하고자 함.

□ 향후계획

◯ 2017. 5월      : 공사착수(착수전 리모델링 계획 공지)

◯ 2017. 9월        : 공사완료

◯ 2017. 10월      : 공사준공 예정. 끝.