문서번호	급수운영과-12785
결재일자	2017.5.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		05/18 김정수
협 조

단수계획 검토보고

(노후밸브 교체)

2017. 5.

강서수도사업소

(급수운영과)

양천구 관내 신정동 신정동 54-1번지 등 일대 노후밸브 교체공사의 단수작업계획서가 제출되어 단수작업 및 홍보 등을 검토 보고함.

2017. 5. 15.

보고자 : 시설6급  성명  김남구

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2017년 양천구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사

○ 공사개요 : 노후밸브(D=80~300㎜) 등 8개소

○ 시공회사 : ****************

□ 지역별 단수계획

연번	공사 위 치	단수예정일	단수시간	단수사유	단수세대	작업일수
1	신월동 54-1(1)	2017.5.19.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	50	1
2	신월동 54-1(2)	2017.5.19.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	50	1
3	신월동 54-1(3)	2017.5.19.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	50	1
4	신월동 492-22	2017.5.20.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	50	1
5	신월동 494-5	2017.5.20.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	50	1
6	신월동 167-1	2017.5.22.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	60	1
7	신월동 167-2	2017.5.22.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	60	1
8	신정동 165-19	2017.5.22.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	60	1

□ 작업계획(노후밸브교체)

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고(산출근거)
제수변 개폐	30분	D80~200mm 5개소
절단 및 직결연결	60분	D80~200mm
세척 및 통수	30분	D100mm 소화전 1개소
합 계	2시간 00분

□ 단수홍보 계획

○ 단수안내문 배포 및 부착[*******]

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사1일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 홈페이지 단수안내 게재(강서수도사업소)

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

○ 다량 급수처 단수안내[*******]

- 병원, 학교, 주요기관등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

□ 단수계획 검토

○ 검토결과

연번	공사 위 치	단수예정일	단수시간	단수사유	단수세대	검토결과
1	신월동 54-1(1)	2017.5.19.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	50	오전/오후 단수안내시간중 1시간씩 단수예정
2	신월동 54-1(2)	2017.5.19.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	50	〃
3	신월동 54-1(3)	2017.5.19.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	50	〃
4	신월동 492-22	2017.5.20.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	50	〃
5	신월동 494-5	2017.5.20.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	50	〃
6	신월동 167-1	2017.5.22.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	60	〃
7	신월동 167-2	2017.5.22.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	60	〃
8	신정동 165-19	2017.5.22.	09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 16:00	노후밸브교체	60	〃

○ 노후 상수도관 교체로 인한 작업계획 일정 검토결과 단수시간을 조정하여 단수작업을 승인코자 하며 현장홍보가 철저히 되어 단수민원이 최소화될 수 있도록 단가계약 교육, 감리업체(*******)에 통보하여 공사진행에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임  : 단수안내 계획서 및 홍보문 1부.  끝.