문서번호	정수과-374
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
서홍교		김영배	04/04 유성종
협 조
	정수시설과장			남효돈

정수시설 청소용역 추진 계획

2014. 4

암사아리수정수센터

(정  수  과)

정수시설 청소용역 추진 계획

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 2014년 정수처리시설 청소 및 준설용역

□ 용역기간 : 2014.03.19. ~ 2014.12.26.

□ 용 역 비 : 금158,400,000원

□ 용역업체 : 미림개발㈜[대표 - 지장용, 소재지 - 서울시 종로구]

□ 청소물량 및 횟수

○ 정수지 52,522㎡, 응집·침전지, 여과지 193,354㎡, 토사 준설 133㎥ 등

○ 응집·침전지 년 1.2회, 정수지, 여과지, 회수조 각 년 1회, 농축조 년 2회,

□ 추진경위

○ 2014.02.07. : 2014년 청소용역 추진계획 방침

○ 2014.02.12. : 청소용역 계약 의뢰(재무과)

○ 2014.03.17. : 청소용역 계약

Ⅱ		청소관련 관계자 회의

□ 일    시 : ‘14. 3. 26(수) 14:00~15:30

□ 장    소 : 정수과 사무실

□ 참 석 자 : 7명

○ 센터(4명) : 정수과 서홍교, 정수시설과 최윤수, 강희권, 이석배

○ 업체(3명) : 우관영 관리부장, 박상우 현장대리인, 유은근 소장

□ 회의내용

○ 정수시설 청소와 시설공사(기계, 토목 등)와의 세부일정 협의

□ 회의결과

○ 수돗물 공급에 차질이 없도록 상호 협의하여 추진

○ 청소 후 시설물 및 각종 기전설비 점검 및 정비

○ 응집·침전지 청소 시 기계, 토목 등 시설 보수공사 병행 실시

- 정수시설과 기계, 토목 등 시설물 보수공사 간 일정 통일 필요

○ 여름철 고탁도 유입, 사용량 증가 등 청소가 어려우니 현장여건 고려하여 실시

○ 업체에서는 작업 전, 중, 후 보고 및 작업결과 주간보고 제출 철저

※ 시설물 보수공사계획(정수시설과)

대상	공사명	공사기간	공사대상	소요일수	비 고
1정수장	침전지 기계설비 보수공사	수시	1-5지,1-8지, 2-3지, 2-6지, 3-8지	1~2일/지	‘14.4월 말 이후
	응집·침전지 구조물 등 보수공사	4월~10월	1-3지, 2-4지(응집지), 3-1지, 4-2지	30일/지	‘14.5월 이후
	상부바닥 정비공사	3월~10월	4계열 전체	5월~6월	‘14.5월 이후
2정수장	침전지 슬러지 배관교체 공사	4월~10월	1~4지	약 7일/지	‘14.4월 중순 이후

Ⅲ		추진계획

□ 청소기간 : ‘14. 4. 1 ~ 12. 26

□ 청소물량 : 청소면적 245,876㎡, 토사제거 133㎥ - [붙임1 참조]

내 용	공종별	시설현황			계획물량
		계	#1	#2	대상	횟수	물량
주벽청소	응집·침전지	40지	32지	8지	48지	1.2회	173,806㎡
	여과지	80지	64지	16지	80지	1회	14,688㎡
	정수지	6지	4지	2지	6지	1회	52,522㎡
	회수조	4지	2지	2지	4지	1회	820㎡
	1차농축조	4지	2지	2지	8지	2회	4,040㎡
퇴적토사준설	회수조	4지	2지	2지	4지	1회	133㎥

□ 청소내용

○ 응집지 주벽, 바닥, 응집 패들 및 부유물제거기 등 기타 시설물 청소

○ 침전지 주벽, 바닥, 웨어, 수로, 슬러지 수집기 등 기타 시설물 청소

○ 여과지 주벽, 트라프, 퇴수로 및 기타 시설물 청소

○ 정수지 주벽, 바닥 청소

○ 회수조 주벽, 바닥 청소 및 퇴적토사 제거

○ 농축조 주벽, 바닥, 웨어, 수로 및 슬러지 수집기 등 기타 시설물 청소

□ 청소일정

○ 기본원칙

- 응집·침전지 청소 시 기계, 토목 등 시설 보수공사와 병행 실시

- 응집·침전지 1개 계열에서 동시에 2지 이상 청소 최대한 자제

- 침전지 및 정수지 내 물은 최대한 정수장 내로 순환될 수 있도록 조치

○ 예정 공정표  -------------------------------------------- [붙임2 참조]

구 분	시설별		청소시기(예정)	비고
1정수장	응집 침전지	1계열	4~9월 중 각 계열별 구분 실시	기계설비 보수공사와 연계(‘14.5월~) 구조물 보수공사와 연계(‘14.5월~) 상부바닥 정비공사와 연계(‘14.6월~)
		2계열
		3계열
		4계열
	여과지		7월~8월
	정수지		10월~11월
	1차 농축조		10월
	회수조		9월
2정수장	응집 침전지	U1계열	4~9월 중 1정수장 청소와 연계 실시	슬러지 배관공사와 연계(‘14.4월 중~)
		U2계열
	여과지		7월~8월
	정수지		10월~11월	필요시 고도처리연결 공사(4월)와 연계
	1차 농축조		10월
	회수조		9월

※ 추진일정은 정수시설 운영, 공사, 현장여건, 기상상태에 따라 변경될 수 있음.

Ⅳ		행정사항

□ 부서관 협조체제 유지

○ 청소 후 응집·침전지 시설물 및 각종 기전설비 점검 및 정비 : 정수시설과

○ 청소관련 각종 동력기기 전원공급, 항비우기 등 협조 : 정수시설과

○ 생산량 조절 및 수질관리 철저 : 정수과

○ 청소시 농축조 부하관리 및 방류수 수질관리 : 정수과

□ 시설물 및 수질관리 철저

○ 청소 및 시설물 공사 관련 사전협의 및 사후점검 철저

○ 시설물 유지관리, 공사, 안전점검 및 고장시설 보수 등 과 병행 실시

□ 청소상태 관리

○ 월간 청소 세부일정 작성·조정 및 작업지시

○ 청소상태 확인 및 결과 보고

붙임 1. 정수시설 청소대상 1부.

2. 정수시설 청소 추진일정 1부. 끝.