함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도 공사 현장 관리감독 철저

1. 누수방지과- 9162호, 9154(2013.12.17)호와 관련입니다.

2. 상수도 공사의 품질 향상을 위한 현장관리 강화 내용을 재 강조하니 공사 관리 감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사용 자재관리 강화

1) 시공전 사용자재 일일 검증제 실시(감리자) : 감독일지에 기록관리(사진 첨부)  (사진은 매설심도, KS 또는 KC(위생안전기준 인증) 표시가 보이도록 촬영)

2) 감리자의 자재검수 및 관리실태 평가

가) 시공자의 보유자재 사용 전 검수이행 여부 확인

나) 자재 이동관리 중 손상이 발생한 경우 보수 후 사용 여부

다) 현장에서 자재관리의 청결성 및 안전성 확보여부 확인 및 촬영

- 청결상태 : 토사, 비닐, 종이 등 이물질 유입방지, 바닥판, 차광막 설치 여부 등

- 노상 적치의 안전성 확보(굴림방지 쐐기설치, 관 손상방지, 통행 안전성 확보, 적재높이 적정성 등)

나. 정밀 시공을 위한 현장 감독업무 강화

1) 감리자 현장 입회율 및 감독일지 기록관리 강화

가) 곡선부, 장애물 통과부위 등 취약공종은 완공시까지 현장입회 및 촬영

나) 단순 반복지속 공종은 최소한 80% 이상 현장입회 확인

다) 공종별 감리사항을 자세히 기록하고, 사진 등을 확보

2) 현장 안전관리 강화

가) 보행자 통행로 확보 및 도우미 배치, 안전휀스 및 공사 안내간판 설치

나) 공사용자재, 장비 및 토사, 폐기물 등 정리정돈, 철거자재 즉시 반출

3) 굴착심도 및 환토재 사용 준수(미이행시 시공자, 감리자 벌점 부과)

가) 굴착심도 측정용 도구(자) 구매(아리수 표시) : 감리자에게 지급

나) 표준 굴착심도 준수 및 모래 환토재 사용 확인 및 촬영

다. 부실 감리자 처벌 강화

1) 부실시공업체(근로자) 벌점 부여(건설기술관리법 시행규칙 제28조 제1항 별표10)

가) 기준 미달 자재 또는 미승인 자재 반입 및 사용한 경우 : 3점

나) 자재관리 불량으로 품질에 영향을 미칠 경우 : 1점

2) 부실 감리업체(감리원) 벌점 부여(건설기술관리법 시행규칙 제28조 제1항 별표10)

가) 주요자재 품질확인을 소홀히 한 경우 : 2점

나) 기타 자재의 품질확인을 실시하지 않은 경우 : 1점

3) 부실근로자 및 감리자 퇴출 실시(지방자치단체 공사(용역)계약 일반조건)

가) 계약담당자가 당해 계약의 수행상 적당하지 아니하다고 인정 이의 교체를 요구할 때

- 계약담당자 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제2조

4) 건설업자(건설근로자)의 고발조치(수도법 제83조)

가) 기준에 맞지 않거나 인증 받지 아니한 수도용 자재나 제품을 사용한 자

나) 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

다) 원스트라이크 아웃(One-Strike Out)제 적용

라. 상수도 공사 종사자 현장관리 인식 개선 교육실시

1) 교육내용 : 자재관리, 시공감리 요령, 공사장 안전관리 등 교육.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시시설관리공단이사장,(주)이준엔지니어링
주무관	이동욱		누수방지과장	강신재		시설안전부장	04/04 윤석우
협조자	주무관	김형준		급수설비과장	김인환
시행	누수방지과-712	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1522	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개