상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	납품기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

1. 시설관리과-10202(2017.5.17.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 사업소에서 시행 중인 「중계2(정암사) 증압장 모터펌프 제작구매 설치」 건에 대해 아래와 같이 납품기한 연기를 의뢰하오니 변경계약하여 주시기 바랍니다.

가. 건      명: 중계2(정암사) 증압장 모터펌프 제작구매 설치

나. 계약상대자: 덕지산업(주) 대표 김종수

다. 계 약 금 액: 금44,150,000원(금사천사백일십오만원)

라. 납품기한 연기

- 당초: 2017. 5. 24.(수)

- 변경: 2017. 6. 8.(목)

마. 귀 책 소 재: 북부수도사업소

바. 지 체 상 금: 미부과

사. 연 기 사 유: 선행공사 지연에 따른 공기 부족

붙임 1. 납품기한 연기 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	송경호		기전팀장	노성제		시설관리과장	05/18 천성훈
협조자
시행	시설관리과-10249	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	skh2010@seoul.go.kr	/	부분공개(5)