문서번호	도시철도토목부-6332
결재일자	2017.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
한재호		최진규	05/18 김진팔
협 조
	주무관			김찬오

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

예비 준공검사 결과보고(2차)

2017. 5

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

예비 준공검사 결과 보고(2차)

하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사(2차)에 대한 준공 기한 내 공사 완공 가능여부 및 미진사항의 사전 보완을 위하여 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1		공사 개요

○ 사 업 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사(2차)

○ 사업규모 : 총연장 628.5m, 정거장 1개소

○ 사업기간 : ‘15.03.30 ~ ‘19.03.28

○ 사 업 비 : 70,397백만원

○ 시 공 자 : 한신공영㈜ 외 4개사

○ 감 리 사 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		예비 준공검사 현황

○ 일    시 : ‘17.05.11(목)

○ 장    소 : 하남선 1-1공구 회의실 및 현장

○ 예비준공검사자 : 도시철도토목부 임경태, 김찬오 주무관

○ 예비준공검사 입회자

- 건설사업관리단

· 기술지원 건설사업기술자 : 김종기, 유승훈

· 건설사업관리기술자 : 홍춘선

- 현장대리인 : 박원철

3		2차공사 추진개요

○ 공사기간 : ‘16.03.07 ~ ‘17.05.31

○ 계약금액 : 금17,100백만원

○ 공 정 율 : 90.30%

○ 추진현황(`17.04 말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계약금액	예비 준공금액	잔여금액
1-1공구(2차)	17,100	15,441	1,659

○ 시공현황

(단위 : 백만원)

구 분	공 종	단위	계 약		시 공		잔 여
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
가시설공	품질관리, 시험발파비 등	식	1	581	1	579	1	2
본선1구간	굴착	㎥	5,520	1,100	4,368	1,028	1,152	72
	차수그라우팅	m	2,668		2,668		-
	사급자재(강재)	ton	1,903		1,554		349
본선2구간	굴착	㎥	9,888	1,475	9888	1,475	-	-
	sheet pile	m	5,360		5360		-
	con’c 타설	㎥	2,761		2761		-
본선 터널	터널굴착(시점부) 상반	m	55.0	932	29.2	556	25.8	376
	터널굴착(종점부) 상반	m	27.0		15.0		12
	강관다단 그라우팅	m	2,448		1,848		600
정거장(개착)	굴착	㎥	70,000	5,290	66,382	4,954	3,618	336
	천공 및 항타	m	3,156		3,156		-
	복공판	㎡	2,850		2,850		-
	H형강 버팀보	본	1,359		1,359		-
정거장(비개착)	반력벽	회	9	2,521	7	1,955	2	566
	강관 압입	본	9		7		2
	토압 지지대	개	500		413		87
외부출입구 등	철근con’c 깨기	㎥	209	147	209	147	-	-
	강일육교 구조물 철거	m	164		164		-
#1,2 본선환기구	굴착	㎥	7,240	764	7,240	734	-	30
	CIP	m	900		900		-
	락볼트	공	239		180		59
	shotcrete 타설	㎡	1,413		791		622
고덕천교	con’c 타설	㎥	1,968	250	1,968	250	-	-
도로복구공 등		식	1	145	1	145	-	-
제경비				3,772		3,495	-	277
제요율적용 제외공종	암매각, 안전관리비 등			123		123	-	-
공사비 계			1	17,100		15,441		1,659

4		예비 준공검사 결과 및 조치계획

○ 2차공사 예비준공검사 결과 공사기간내에 잔여공사 진행에 차질이 없는 것으로 판단되고

○ 예비 준공검사일 기준 잔여공사에 대하여 건설사업관리단으로 하여금 준공일 이전에 공사가 완료토록 조치하고자 함.

붙 임 : 예비준공검사 서류 1부.  끝.