문서번호	시설과-1613
결재일자	2017.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
강희진	장창원	05/19 진병규
협 조

『전광판 제어공사(천호공원 야외무대 시설정비)』

공사기한 연장 검토 보고

2017. 5

동부공원녹지사업

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『전광판 제어공사(천호공원 야외무대 시설정비)』

공사기한 연장 검토 보고

『전광판 제어공사(천호공원 야외무대 시설정비)』 시행과 관련하여, 전광판과 야외무대 음향장비 연결을 위하여 공사기한 연장을 검토 보고합니다.

Ⅰ		추진개요

○ 공 사 명 : 전광판 제어공사(천호공원 야외무대 시설정비)

○ 착 공 일 : ‘17.4.27

○ 준공기한 : ‘17. 5. 20

○ 도 급 자 : ㈜넥시스 정보 대표 오세후

○ 도 급 비 : 12,480,000원

Ⅱ		준공기한연기검토

❍ 연기기간

- 당초 : ‘17.4.24 ~ ’17.5.20

- 변경 : ‘17.4.24 ~ ’17.5.31

❍ 연기사유

- 전광판 영상의 음성을 야외무대 음향장치에 입력하기 위한 연결작업을 계약기간 내에 완료가 어려우므로 준공기한 연장필요

❍ 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 : 미부과

Ⅳ		보고자의견

❍ 상기와 같이 준공기한을 연장하여 시공에 만전을 기하고자 함. 끝.