문서번호	토목부-10297
결재일자	2017.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	05/22 김영수
협조

버스정차대 전기관로 매설비용 반영 검토보고

(새문안로 중앙버스전용차로 설치공사)

2017. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

버스정차대 전기관로 매설비 반영 검토보고

(새문안로 중앙버스전용차로 설치공사)

시 교통정보과에서 버스정차대내 설치요청한 버스정보안내단말기(BIT) 작업시 소요된 전기관로 매설비를 반영코자 검토보고 드림.

공사현황

○ 사 업 명 : 새문안로 중앙버스전용차로 설치공사

○ 위    치 : 서대문구 미동초교앞~세종대로 사거리

○ 규    모 : 전체 1,200m, 버스승강장 4개소 설치

○ 기    간 : 2016.11.30. ~ 2017. 6.30.

○ 사 업 비 : 2,019백만원(도급비:1,383백만원)

○ 시 공 사 : 국성산업개발(주), 감 리 사 : 제일엔지니어링외 1

○ 공 정 율 : 99%

실정보고

○ 버스정보안내단말기(BIT) 작업시 소요된 전기관로 매설비 반영 필요

- 버스정차대 4개소내 BIT 전기배관등 전용 회로 구성에 대한 매설 비용임

- 관련근거 : 새문안로 중앙버스전용차로 버스정보  안내단말기(BIT) 설치 협조요청에 대한 회신[교통정보과-3057(2017.2.23.)호]

○ 위치도

서대문역 버스정차대 설치구간	정동사거리 버스정차대 설치구간

○ 물량 검토

구 분	규 격	단위	당초	변경	증.△감	비고
5. 부 대 공
BIT 전기관로 매설		식	-	1	1

○ 사업비 검토                                           (단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증.△감	비 고
BIT 전기관로 매설	-	29,904	29,904
직 접 공 사 비	-	29,904	29,904
간 접 공 사 비	-	15,096	15,096
공 급 가 액	-	45,000	45,000
부 가 가 치 세	-	4,500	4,500
도 급 액	-	49,500	49,500
총 공 사 비	-	49,500	49,500

○ 신규단가적용 검토 :  강제협의율(93.374%) 적용

- 지방자치단체 공사계약일반조건. Ⅶ.계약금액의 조정.1-나항의 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우"에 해당되는 설계변경으로 강제협의율 적용. (86.747+100)/2)=93.374%)

검토결과

○ 비용반영을 위한 책임건설사업관리기술자의 실정보고가 타당함으로 승인코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

변경내역서 1부.   끝.