투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 2017년 상반기 관공선 수리 용역

1. 수상안전과-2478(2017.05.16.)호와 관련입니다.

2. 「2017년 상반기 관공선 수리 용역」건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

용 역 명	2017년 상반기 관공선 수리 용역
계약상대자	시흥조선 (대표 : 이기설)
계 약 금 액	금191,621,000원(금일억구천일백육십이만일천원)
계 약 일 자	2017.04.20.
용 역 기 간	2017.04.25 ~ 2017.05.19.

나. 변경내역 : 용역기간 변경(2017.04.25. ~ 2017.06.19.)

변 경 내 역	변경전	변경후
용 역 기 간	2017.04.25. ~ 2017.05.19.	2017.04.25. ~ 2017.06.19.

다. 변경사유 : 검사 및 수리 중 선저 킬쿨링 박스 부식 및 파공, 파이프 라인의 균                          열이 발견되어 추가 수리 실시.

붙     임 : 1. 용역변경계약서 1부.

2. 계약의뢰서 1부.

3. 변경계약보증서 1부.

4. 용역계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	05/22 박기용
협조자
시행	총무과-8348	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(7)