문서번호	도로보수과-5339
결재일자	2017.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	도로보수과장
박성근	전결 05/22 김권일

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제2차 추가 작업지시 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5

강서도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제2차 추가 작업지시 계획보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2017. 3. 15. ~ 2017. 12. 15.

○ 시공업체 : (주)지아이엘건설  대표 김용이

○ 도 급 비 : 656,475,500원

□ 작업지시 내역

○ 경찰청 규제심의 노면표시 제거 및 신설(이월)

- 위   치 : 강서구 방화동 877(청성아파트 앞)외 1개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 신설 L= 779m

○ 강서구청 노면표시 재도색(감사담당관 도로순찰)

- 위   치 : 강서구 가로공원로 72길 3외 6

- 공종 및 물량 : 노면표시 재도색  L= 772m

○ 120 민원사항 노면표시 재도색(붙임 참조)

- 위   치 : 양천구 오목로 129 앞

- 공종 및 물량 : 노면표시 재도색  L= 60m

□ 조치계획

○ 위와 같이 노면표시 상태가 불량(도로순찰·민원 및 규제 등)한 구간을 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 시공하고 추후 설계변경시 정산처리코자 함.

- 건    명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 추가 작업지시(제2차)

- 작업위치 : 강서구 방화동 877(청성아파트 앞)외 9개소

- 작업기간 : 2017. 05. 23. ~ 2017. 06. 30.

- 개략금액 : 5,016천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 공종 및 물량 : 1,611m

▸ 노면표시 도색   :  626m

▸ 노면표시 재도색 :  832m

▸ 노면표시 제거   :  153m

붙 임  1. 추가 작업지시서(수량산출포함) 1부.

2. 개략공사비 1부.

3. 작업지시 설계 도면 각 1부(별도첨부).

4. 강서구청 도로환경 점검결과 공문 1부.  끝.