문서번호	시설관리과-9571
결재일자	2017.5.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
송종학		05/23 김태형
협 조
	주무관			김용현
	주무관			송종범
	주무관			임인택
	주무관			박홍선

설계변경 심의 의견서

(2016년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사)

2017. 05. 23.

강동수도사업소

시설관리과

설계변경 심의의견서

공 사 명 : 2016년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사

신청부서명	시설관리과
작 성 자	송종학
제출년월일	2017. 05. 23.

심의위원회 의견

❍ 심의일시 : 2017. 05. 23(화) 10:00

❍ 심의의견 : 설계변경에 따른 사전심의 결과 다음과 같이 의견을 제시함

구 분	직 위	성명	심의의견	비고
위 원 장	시설관리 과장	김태형	타당함
위 원	주무관	송종범	타당함
위 원	주무관	김용현	타당함
위 원	주무관	임인택	타당함
위 원	주무관	박홍선	타당함

설계변경 사유서(3차최종)

공사개요

○ 공 사 명 :2016년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

○ 공사규모 : 당초 D = 13 ~ 2,200㎜, N = 650개소

변경 D = 13 ~ 2,200㎜, N = 602개소

****************************************

***********************************************

*****************************************************************

*****************************

설계변경 세부내용 및 사유

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 2항 및

공사계약 일반조건 제7절 나항

○ 계약물량 변경 (신규공정 없음)

- 물량증가 : 아스팔트 포장절단 100~150mm, 누수 외 308개 공종

- 물량감소 : 콘크리트 포장절단 100~150mm, 누수 외 683개 공종

설계변경 금액내역                                                                                                       (단위 : 원)

공 종	변경 내용		변경 사유	비 고
	당 초	변 경
*	*************	*************	*******
***	***********	***********	*******
***	***********	***********
****	**********	*********
***	***********	***********
****	**********	**********
***	**********	**********
**	***********	***********

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증 1부. 끝.