문서번호	공원운영과-8163
결재일자	2017.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	공원운영과장
홍우진	고정곤	05/23 문근식
협 조

『경의선숲길공원 녹지대 정비공사』

관급자재 추가 구매 검토 보고

2017. 5.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

『경의선숲길공원 녹지대 정비공사』관급자재 추가 구매 검토 보고
		c

우리 사업소에서 시행중인『경의선숲길공원 녹지대 정비공사』와 관련하여 현장 여건에 따른 관급자재 물량변경 사항이 있어 보고 드림.

Ⅰ		구매 개요

❍ 건    명 : 경의선숲길공원 녹지대 정비공사 관급자재 구매

❍ 계약금액 : 금 6,669,300원

❍ 구매내역 : 잔디보호매트 141㎡

❍ 계 약 일 : 2017. 5. 2.

❍ 계 약 자 : 키그린(주) 대표 박서영

Ⅱ		물량증가사유 및 내용

❍ 물량변경 사유

- 홍대입구역 주변 등 잔디훼손이 심한 지역의 현장 여건에 맞게 잔디보호

매트 물량을 추가 구매하여 설치

❍ 변경내역

- 수 량 : 당초 141㎡ →  변경 181㎡ (증 40㎡)

- 금 액 : 당초 6,669,300원 →  8,561,300원 (증1,892,000원)

Ⅲ		보고자 의견

❍ 경의선숲길공원 잔디보호 및 경관향상을 위해 필요한 사항으로, 경의선 숲길공원 유지관리(시설비) 예산범위안에서 추가 구매 조치하여 사업시행에 만전을 기하고자 함.  끝.