상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약변경 의뢰(계약기간 연장)

1. 한양도성도감-5329(2017.5.23)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 ‘한양도성 창의문 옥외소화전 설치공사 설계’용역의 계약기간을 아래와 같이 연장하고자 하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 계약건명 : 한양도성 창의문 옥외소화전 설치공사 설계용역

- 계약업체 : ㈜한빛안전기술단

- 계약금액 : 4,150,000원(금사백일십오만원)

나. 변경내용 : 계약기간 연장 (금액변동없음)

- 당 초 : 2017.4.11 ~ 2017.5.25

- 변 경 : 2017.4.11 ~ 2017.6.14

* 연장사유 : 문화재청 설계승인 시일 지연으로 인한 설계 용역 기간 연장

붙임 : 1. 관련방침 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
★주무관	구선이		도성보존팀장	신추교		한양도성도감과장	05/23 심말숙
협조자
시행	한양도성도감-5335	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2672	/전송	2133-1063	/	ungum9@seoul.go.kr	/	대시민공개