문서번호	생산관리과-6252
결재일자	2017.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산관리과장
신왕근		한희선	05/23 한희선
협 조

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 』

관급자재(이형봉강) 구매 계약 변경 검토 보고

2017.  05.

상수도사업본부

(생산부 생산관리과)

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사』

관급자재(이형봉강) 구매 계약 변경 검토 보고

“뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사” 와 관련하여 관급자재(이형봉강)구매 계약 변경에 대한 검토사항을 보고 드림

Ⅰ		계약 개요

❍ 계 약 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재 “이형봉강” 구매

❍ 계약업체 : 현대제철주식회사 우유철 (조달구매 계약)

❍ 계약금액 : 429,324,330원(품대-427,247,910원,수수료-2,076,420원)

❍ 계약일자 : 2016. 3. 29.

❍ 납품기한 : 2017. 6. 30.(분할납품)

Ⅱ		현 황

❍ 이형봉강 관급자재 조달단가 상승 및 일부자재 납품수량 변경

자재명	규격	단위	수량 변경			조달단가 변경
			계약 수량	납품 수량	잔량	계약단가 (’16.3.29)	’16.4.7 이후	’17.2.1 이후
이형봉강	D13	TON	64.984	64.984	0.000	542,680	606,360	638,670
	D16	TON	46.602	45.101	1.501	537,370	601,050	633,400
	D19	TON	100.220	89.014	11.206	537,370	601,050	633,400
	D22	TON	89.088	89.088	0.000	537,370	601,050	633,400
	D25	TON	365.013	365.013	0.000	537,370	601,050	633,400
	D29	TON	128.523	128.523	0.000	537,370	601,050	633,400

Ⅲ		계약변경 내용

❍ 계약변경 사유

- 관급자재(이형봉강) 조달단가 상승

- 관급자재(이형봉강) 일부 자재 납품수량 감소

❍ 계약변경 내역

자재명	규격	단위	수 량			계약금액(원)
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
이형봉강	D13	TON	64.984	64.984	0.000	35,265,517	40,093,968	4,828,451
	D16	TON	46.602	45.101	-1.501	25,042,516	27,476,907	2,434,391
	D19	TON	100.220	89.014	-11.206	53,855,221	53,501,864	-353,357
	D22	TON	89.088	89.088	0.000	47,873,218	54,416,620	6,543,402
	D25	TON	365.013	365.013	0.000	196,147,035	222,237,895	26,090,860
	D29	TON	128.523	128.523	0.000	69,064,404	81,406,467	12,342,063
	소 계					427,247,910	479,133,710	51,885,800
	수 수 료					2,076,420	2,328,580	252,160
	합 계					429,324,330	481,462,290	52,137,960

Ⅲ		검토 의견

❍ 관급자재(이형봉강) 계약변경에 대한 책임건설사업관리기술자의 보고

내용이 적정하므로 계약상대자인 현대제철(주)과 상기 변경 내용으로

변경계약 코자 함

따로붙임 : 관급자재(이형봉강) 계약 및 검수 현황 제출 CM 공문 1부. 끝.