문서번호	설비부-8556
결재일자	2017.5.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		여인웅	05/24 권오식
협 조

『서울역 7017프로젝트 전기·통신공사』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 05

도시기반시설본부

(설   비   부)

『서울역 7017프로젝트 전기·통신공사』

준공기한 연기 검토 보고

우리 본부에서 추진하는『서울역 7017 프로젝트 전기·통신공사』와 관련 건설사업관리기술자로부터 제출된 준공기한 연기 요청에 대한 검토 보고 드림.

Ⅰ				공사개요

○ 공 사 명 : 서울기록원 건립 전기 · 통신공사

○ 위    치 : 중구 남대문로5가 527 ~ 만리동 1가 62

○ 공사규모 : 고가도로 폭 10.3m, 연장 938m 보수·보강

○ 주요설비 : 수전설비 22.9kV 500kVA, 비상발전기 130kW, 경관조명 1식

방송설비, CCTV, 비상벨 등

○ 공사기간 : 2016.04 ~ 2017.06

○ 계약금액 : 전기 총차2,198,519천원(2차1,723,661천원)

통신 총차402,797천원(2차202,797천원)

○ 계약업체 : 전기  대명전력(주), 통신  이비인프라(주)

Ⅱ				관련근거

○ 건축부-7175(2017.4.25.) 3차 계약 준공기한 연기 검토보고

○ 서울역(건) 제17-386호(2017.5.23.) 준공기한 연기요청 검토보고

Ⅲ				준공기한 연기 검토

○ 연기사유 : 서울역 파출소 청사 신축 추가공사

○ 연기내용

구 분	당 초	변 경	증·감
전기(총차)	‘16.05.02.~’17.06.01	‘16.05.02~’17.10.21	증)141일
전기(2차)	‘17.02.26~’17.06.01	‘17.02.26~’17.10.21
통신(총차)	‘16.05.12.~‘17.06.11	‘16.05.12.~‘17.10.31
통신(2차)	‘17.02.09.~‘17.06.11	‘17.02.19.~‘17.10.31

○ 검토결과

- 연기사유 귀책 소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금 부과 여부 : 미부과

○ 건설사업관리기술자 검토의견

- 서울역 파출소 청사 신축으로 전기·통신공사 추가 공사기간이          필요함에 따라 준공기한을 연장하는 것이 적정한 것으로 판단함.

Ⅳ				보고자 의견

○ 건설사업관리기술자로부터 제출된 준공기한 연기 요청사항을          검토한 결과 타당하다고 판단됨으로 계약 변경의뢰하고자 함. 끝.