문서번호	토목부-6522
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
조양연	代조양연	04/04 노우성

공사장 휴일작업 계획 보고(4월)

(구리암사대교건설공사)

2014. 4

도시기반시설본부

(토 목 부)

공사장 휴일작업 계획 보고(4월)

(구리암사대교건설공사)

우리 본부에서 시행중인 『구리암사대교건설공사』와 관련 구리시 협의 지연으로 부진한 공정을 만회하기 위하여 책임감리원이 요청한 휴일작업 계획에 대한 검토 보고임.

※ 휴일작업 기간 : ′14.4.05~4.27(매주 토◾일요일)

□ 공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동

○ 개    요 : 폭 24~44m(4~6차로), 교량 1.13km, 입체교차 2개소

- 아천 IC (7,417 m / 1,505 m)

- 암사 IC (4,998 m / 1,766 m)

○ 총사업비 : 352,176백만원 (국비 : 50%,  시비 : 50%)

○ 사업기간 : '2006. 4. 5 ~ '2014. 12. 31

○ 시 공 사 : 현대건설(주)

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1개사

□ 관련근거

○ 공사장 안전관리 강화를 위한 휴일작업 현장관리 개선방안 검토 보고

- 도시철도토목부-10681(‘13.11.14) : 본부장방침

□ 책임감리 휴일 근무 및 대가지급 기준

○ 단순공정이고 5명이하 적은 인원이 작업할 경우 현장책임자(원청사 책임자)입회하에 작업하고, 작업내용을 사진 등을 첨부하여 감리단에 보고

○ 단순공정일때 감리원 미배치하되 작업중 주요 공정 발생시 감리원 배치 입회하에 공사 시행

○ 휴일근무 감리대가는 귀책사유에 따라 지급

- 발주청 귀책 : 휴일근무하고 평일대체 휴무

- 시공사 귀책 : 시공사에서 감리원 휴일근무대가 지급

□ 휴일작업 기간 및 휴일작업 사유

휴일작업기간	작업 사유	비 고
2014.4.05. ~ 4.27 ( 매주 토◼일요일)	◦ 부진공정 만회 ◦ 구리암사대교 개통 일자 준수

□ 휴일 주요 작업 공종

○ 아천IC 구간 토공작업 및 교각부 철근조립 및 거푸집조립

○ 아천IC 구간 토공작업 및 보강토 옹벽설치와 배수구조물 설치

□ 조치 의견

○ 원활한 공정관리 및 안전관리를 위하여 시공사가 제출한 휴일 작업은 필요하다고 판단됨.

○ 감리단에서 제출한 휴일 작업 계획에 대하여 현장 관리 철저 안전사고 예방을 위한 5rp 시행토록하여 승인코자 합니다.

붙임 : 휴일작업승인요청 공문 1부.  끝.