문서번호	방재시설부-8852
결재일자	2017.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	치수시설과장	방재시설부장
박중모	조성만	05/24 남궁용

-청계천 생태환경 개선공사(2단계)-

설계변경 검토보고(총차 2회,1차 2회 : 정산)

2017. 5.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

-청계천 생태환경 개선공사(2단계)-

설계변경 검토보고(총차 2회,1차 2회 : 정산)

기 실정보고 승인 처리된 사항에 대한 감독기관(공단) 제출 설계 변경(총차 1회, 1차 2회 : 정산)에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거 : 설계변경 제출(서울시설공단 공사감독2처-3744호 : ‘17.5.23.)

1		공사개요

□ 공 사 명 : 청계천 생태환경 개선공사(2단계)

□ 공사내용 : 여울보 및 징검다리 개선(12개소), 저수호안 사행개선(283개소)

유량 측정용 하상차수제 천공(50공), 진출입로 설치(2개소)

홍수방호벽 설치(145m), 둔치 보완 식재 등

□ 계약금액 : 2,080,507천원

□ 공사기간 : ‘16. 08. 26. ~ ‘18. 02. 25.

□ 시 공 사 : 충정종합건설주식회사(감독기관 : 서울시설공단)

2		설계변경 현황

□ 설계변경사유

- 기 실정보고 승인사항 및 1차 준공에 따른 시공물량 정산 등 설계내역 반영

□ 주요변경내용

- 제2경사로 신설구간의 발생토사 사토장 위치 변경(감1백만원)

․ 김포매립지(L=52.4km) → 김포시 석모리(L=48.3km)

- 제2경사로 신설구간의 강교 안전난간 추가설치 및 가시설 사장(증26백만원)

․ 난간 추가설치 64m, 가시설 사장 h-pile(36본) + 토류판

- 폐토석 처리, 깨기수량 증가, 목재데크 하지재 변경(증6백만원)

․ 제1경사로 건설폐토석 258㎥,  기존 구조물 철거와 기존 포장 두께 증가 80㎥

- 보식조경 구간내 유지관리기관(공단) 요구사항 반영 수목식재 변경(감5백만원)

- 제2경사로 돌붙임 고정재 반영 및 두겁석 증가수량 반영(증8백만원)

․ 고정재 178㎡, 두겁석 증가수량 11㎡

- 1차 준공에 따른 시공 물량, 보험료, 제경비 등 정산 반영

□ 사전절자 이행

- 공단 설계변경 심의완료(건당 50백만원 이하 등 본부 설계변경소위원회 미심의 대상)

□ 설계변경금액(공사기간 변경없음)

- 총차 2회

구 분		금 액(원)
		당 초	변 경	증 ․ (감)
도급비	공 급 가 액	1,891,370,000	1,891,030,000	(340,000)
	부가가치세	189,137,000	189,103,000	(34,000)
	소 계	2,080,507,000	2,080,133,000	(374,000)

- 1차 2회(정산)

구 분		금 액(원)
		당 초	변 경	증 ․ (감)
도급비	공 급 가 액	793,480,000	724,472,728	(69,007,272)
	부가가치세	79,348,000	72,447,272	(6,900,728)
	소 계	872,828,000	796,920,000	(75,908,000)

3		감독기관 의견

□ 실정보고 승인 건 및 1차분 정산 등에 대한 설계변경 반영 건으로 설계도서 검토결과『적정』함.

4		조치계획

□ 상기와 같이 설계변경(계약금액 조정)하여 공사시행에 만전을 기하고,  계약부서(건설총괄부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 감독기관(공단) 관련문서 1부.

2. 감독기관(공단) 설계변경 검토보고서 1부.

3. 설계변경내역서(총차 2회, 1차 2회 – 정산) 1부.

4. 설계변경 관련보고서 1부.

5. 시공사 관련문서 1부.

6. 도면, 변경세부내역서, 수량산출서 등 1부.(용량초과 별도보관) 끝.