함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기 및 재계약 의뢰 요청(서울경찰청~독립문역외 1건)

1. 우리사업소에서 시행중인 “서울경찰청~독립문역 송배수관공사 외 1건 교통소통대책 수립용역”에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기코자 재계약 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울경찰청~독립문역 송배수관공사 외 1건 교통소통대책

수립용역

###########################

##################################

라. 준공기한 연기

- 당초 : 2014. 02. 12 ~ 2014. 04. 10.

- 변경 : 2014. 02. 12 ~ 2014. 05. 10.

마. 귀책소재 : 중부수도사업소

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 연기사유 : 서울특별시 교통소통대책 자문회의가 4월9일에 예정되어 있으며,                             교통소통대책 자문회의 심의결과에따른 서울지방경찰청 규제심의를                             진행하는데 있어 본 용역의 절대공기 부족.

붙임 : 1) 준공기한 연기 내부방침 1부.

2) 합의서 1부(별도송부).  끝.

	시설관리과장
주무관	이생기		시설관리팀장	代채재일		시설관리과장	04/07 나태산
협조자
시행	시설관리과-9054	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	부분공개