문서번호	급수운영과-13460
결재일자	2017.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박경원		이상무	05/25 김정수
협 조

배급수관 정비공사 실정보고에 따른 검토 보고

(개봉동 339번지외 6개소 배급수관 정비공사)

2017. 5

강서수도사업소

(급수운영과)

「개봉동 339번지외 6개소 배급수관 정비공사-5구간」

공사 실정보고에 따른 검토

「개봉동 339번지외 6개소 배급수관 정비공사-5구간」와 관련하여, 시설관리공단으로부터 작업조건 변경(당초 주간→변경 야간)에 대한 실정보고 제출에 따른 검토결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017.  05.  25.

보고자 : 시설7급   성명  박 경원

□ 공사 현황

가. 공 사 명 : 개봉동 339번지 외 6개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요： D=20~300mm, L=2,215m

다. 공사기간： 2017. 04. 13. ~ 12. 17

라. 공사금액(도급) : 644,811,930원

마. 계약상대자： ㈜미래엔티씨 대표 박병훈

□ 실정보고 내용 및 검토결과

가. 관련대호 : 공사감독2처-3803(‘17.05.24)호

나. 보고내용 및 검토의견

연번	실정보고 내용	시설관리공단 의견	검토 의견	비고
1	[5구간] 작업조건 변경	1)작업조건 변경(연결공사): 당초 주간 → 변경: 야간 (사유: ①교통통제에 따른 민원 및 영업피해, ②대단위 단수수반	1) 공사구간 도로가 일방통행이고 폭 4~5m의 협소한 도로로, 굴착공사에 따른 각종 민원(통행불편 및 피해배상 등)이 빈번하였고, 상가가 밀집한 지역 여건상 연결공사 시 대단위 단수가 수반됨에 따라 2차 영업피해 민원이 예상됨에 따라 시민불편(차량통행, 영업피해등) 최소화를 위하여 야간공사로 시행함이 타당함.

□ 조치 계획

- 시설관리공단에 우리사업소 검토 결과를 첨부하여 단수작업계획 승인 통보코자 하며,

- 우리 상수도 홈페이지에 단수관련 내용을 공지하여 단수로 인한 시민불편 사항이 최       소화 되도록 만전을 기하고자 합니다.

붙 임. 공사 실정보고서(시설관리공단) 1부.  끝.