문서번호	녹지관리과-2626
결재일자	2017.5.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		녹지관리과장	공원부장
김대호		문경재	전결 05/25 문길동
협조	총무과장		박병현
	주무관		주홍열

광나루한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 실시설계용역

준공기한 연장 검토

공  원  부

(녹지관리과)

광나루한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 실시설계용역

준공기한 연장 검토

우리본부에서 추진 중인 ｢광나루한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 실시설계용역｣과 관련하여, 사업추진과 연계된 소규모 환경영향평가 협의 및 하천점용허가 등 원활한 행정절차 이행을 위해 준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

용역개요

○  용 역 명 : 광나루한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 실시설계용역

○  위    치 : 광나루한강공원 레일바이크장(천호대교 남단)

○  용역내용 : 힐링숲 체험공원 조성을 위한 실시설계용역

○ 용역기간 : 2017. 3. 21 ~ 5. 29

○ 용 역 비 : ********

○ 용역기관 : *****************

준공기한 연장

○ 용역기간

구 분	용 역 기 간	용 역 비	비고
당 초	2017. 3. 21. ~ 5. 29.	변동없음
변 경	2017. 3. 21. ~ 8. 25.

○ 연장사유

- ‘광나루한강공원 힐링숲 체험공원 조성사업’ 추진과 연계된 소규모 환경영향평가 협의 및 하천점용허가 등 원활한 행정절차 이행을 위해 과업기간 연장이 필요한 실정임

귀책소재 및 지체상금 부과

○ 귀책소재 : 한강사업본부

○ 지체상금 : 미부과

검토의견

○ 서울지방국토관리청 및 한강유역환경청 등 소규모 환경영향평가 협의․승인 및 하천점용허가에 소요되는 기간을 고려하여,

○ 상기와 같이 ‘광나루한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 실시설계용역’

준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.