투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	계약 변경 요청 (슬러지건조시설 외 1개소 굴뚝TMS장비 구매설치)

1. 관리과-13771(2016. 11. 3)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련『슬러지 건조시설 외 1개소 굴뚝TMS장비 구매설치』건에 대하여 아래와 같이 계약 변경(납품기한 연기)을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 슬러지건조시설 외 1개소 굴뚝TMS장비 구매 설치

나. 납품기간 : ‘16. 11. 3 ~  ’17. 5. 31

다. 계약금액 : 146,931,400원

라. 계 약 자 : 수엔지니어링 (대표 박대수)

마. 계약변경내역

구 분	당 초	변 경	변경	변경사유
납품기한	’17. 5.31	’17. 7. 31	-	- 유속계 정도·통합검사 기간 추가소요

사. 예산과목 : 중랑물재생센터운영, 중랑물재생센터수처리유지보수,시설비

붙임 : 방침서 및 합의각서 각 1부.. 끝.

	시설보수과장
주무관	안봉용		시설보수과장	05/25 윤승범
협조자
시행	시설보수과-3607	(		)	접수		(		)
우	04809	서울시 성동구 자동차시장3길 64(송정동 73) 중랑물재생센터 본관 3층 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	2211-2560	/전송	2211-2579	/	abbby@seoul.go.kr	/	대시민공개