문서번호	급수운영과-9491
결재일자	2017.5.29.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
이덕규	김용현	05/29 전명수
협 조

급수공사 연기 보고(신설-74)

명에 의거 마천동 외 14개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 2017년 마천동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 계약기간 : 2017. 2. 7. ~ 2018. 6. 30.

○ 계약상대자 : *************

○ 급수공사 기한 연기 내역

지시번호	공사위치	공사개요	기존 공사기간	공사 연기기간	연기사유
신설-74	********	************	’17. 5. 19. ~ ’17. 5. 29.	’17. 5. 19. ~ ’17. 6. 12.	****** ********

□ 지체상금 부과여부 : 신축공사 공사지연으로 수요가 요청에 의한 급수공사 연기건이므로                       지체상금 미부과

□ 조치내용

- 상기와 같이 수요가의 급수공사일정 연기 요청에 따라 변경된 공사 기간을 *****************통보하고자 합니다.

붙임  공사연기요청서 1부.  끝.