투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰[세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 기계설비공사]

우리부에서 시행중인 『세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 기계설비공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약(준공기한 연기) 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 기계설비공사

나. 계 약 자 : ㈜을화   대표 서경

다. 계약금액 : 금273,809,800원

라. 변경계약(준공기한 연기) 내용

구 분	공 사 기 간			비 고
	당 초	변 경	증·감
기계설비공사	2016.04.04.~2017.05.31.	2016.04.04.~2017.08.31.	증)92일	계약금액 변경없음

마. 변경사유 : 건축공사 공기연장에 따른 설비공사 공기연장

붙 임 : 1. 방침(보고)서  1부.

2. 합의서  1부.  끝.

	설비부장
★주무관	이호완		건축설비과장	김은덕		설비부장	05/29 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-8885	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96) 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	lee5858@seoul.go.kr	/	부분공개(5)