문서번호	급수설비과-2265
보존기간	년
결재일자	2014.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	급수설비과장	급수부장
김형준	김인환	04/07 이상홍
협 조

급수공사 감독대행 주간실적 보고

2014. 4. 7

상수도사업본부

(급수설비과)

급수공사 감독대행 주간실적 보고

상수도공사 시공감독업무 위탁과 관련하여 급수공사 감독대행 주간실적 검토회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ. 시공감독 위탁현황

□ 위탁개요

○ 위탁대상

- 급수공사 및 인입관 철거 ․ 폐쇄(포장복구 포함) : 39,000건

- 긴급누수복구공사(포장복구 포함)              : 49,000건

○ 위탁기간 : 2013. 5. 25 ~ 2015. 5. 24

○ 계약금액 : 9,131,891,000원

○ 도 급 자 : (주)이준엔지니어링, (주)건양엔지니어링

□ 인력현황

○ 근무인원 : 31명

- 상주 : 28명(중급 8명, 초급 20명), 비상주 3명

Ⅱ. 검토회의 및 주간실적

□ 검토회의

○ 일   시 : 2014. 4. 7 (월) 14:00~14:50

○ 장   소 : 급수부 회의실

○ 참 석 자 : 5명(급수설비과장, 담당주무관, 기술지원감독대행자 비상주 3명)

○ 회의내용 : 주간실적 검토 및 지시사항 전달

□ 추진실적

○ 급수공사(상주감독대행자)

- 기 간 : 2014. 03. 24 ~ 03. 30.

구 분		감독대행			현 장 입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		계	현장입회 (건)	사후확인 (건)
금 주		369	369	-	100	1,140	10
누계	’14.1.1이후	2,778	2,766	12	99.60	7,687	107
	’13.5.25이후	15,530	15,331	199	98.70	51,089	441

- 시정조치 : 안전 6, 배관 1, 토공 1, 기타 2건.

○ 포장복구공사(상주감독대행자)

- 기 간 : 2014. 03. 24. ~ 03. 30.

구 분	계			급수공사업체 복구			포장업체 복구
	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)
금 주	227	202	89.0	75	72	96.0	152	130	85.50
누 계	1,978	1,767	89.30	701	690	98.40	1,277	1,077	84.30

○ 상주감독대행자 상호 업무지원

- 기 간 : 2014. 03. 24 ~ 03. 30.

구 분	계			사업소 내			사업소간
	계	급수공사	누수복구	소계	급수공사	누수복구	소계	급수공사	누수복구
금주(회)	13	11	1	12	11	1	1	1	-
누계(회)	105	82	23	88	65	23	17	17	-

○ 사업소 순회 지도감독(기술지원감독대행자)

- 기 간 : 2014. 03. 31 ~ 2014. 04. 04.

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
지도감독 (건)	급수	18	2	2	2	3	2	2	3	2
	포장기타		-	-	-	-	-	-	-	-
시정조치(건)		2	1	-	-	-	1	-	-	-

※ 시정조치 : 불량자재 적출 폐기 및 안점모 구매 지급 지시

Ⅲ. 지시사항

○ 단수시 단수안내 철저

( 사전 예고 없는 단수시 작업중지후 단수안내후 작업시행 )

○ 작업이 많아지는 시기이므로 각종 안전사고 예방에 철저히 감독 할 것

○ 굴착시 타시설물에 대한 안전성 여부 확인

○ 사업소별  사업소내의 지원근무를 탄력적으로 활용하여 추진할것

○ 자재관리 철저 (kc인증 등)

따로붙임 : 위탁감독대행 주간실적 각 1부. 끝.