문서번호	도로보수과-2989
결재일자	2017.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
조재민		代한수영	06/01 이덕기
협조

불량맨홀 정비대상(2차) 협의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6

불량맨홀 정비대상(2차) 협의결과 보고

우리사업소 관내 불량맨홀 2차분 정비대상에 대하여 맨홀관리기관과 정비 주체 협의 후 그 결과를 보고함.

□ 불량맨홀 현황(2차)

○ 정비대상 : 돌출, 침하, 맨홀단차(뚜껑면과 도로포장면 10mm이상), 맨홀주변 포장불량

구분	계	하수도	상수도	통신	기타
계	80	15	27	32	6

□ 협의결과

○ 협의기관 : 영등포구청(안전치수과)외 16개 맨홀관리기관

○ 결    과 : 73개소(맨홀관리기관 정비 : 19개소)

구 분	계	도로관리청 정 비	맨홀관리기관 정 비	기타
수 량	92	61	19	12

- 금천구청, 영등포구청, KT구로지사, KT동작지사, C&M, 도시가스 자체정비 희망, 정비후 전후사진 제출토록 조치

- 기타 12개소는 1차 작업지시분중 자재 미확보분과 파손정도가 심해 긴급하게 정비시행한 물량임.

□ 조치 계획

○ 정비물량(73개소) 대해 「‘17년 특별시도상 불량맨홀 정비공사(연간단가)」계약자 ㈜태평림건설(대표 이동균)에 1차 작업지시(기간:’17.06.02~07.07)코자 하며,

○ 자체 정비시행 예정 기관에 대하여는 6월까지 시행후 정비실적 결과통보토록 안내하고 미이행시 우리사업소에서 정비시행.

○ 노후맨홀(맨홀받침포함)교체가 수반되는 10개소는 맨홀관리기관과 자재수급 관련 사전 협의를 통해 일정에 차질을 빚지 않도록 추진.

붙 임 : 불량맨홀 정비 협의결과 리스트 1부.  끝.